별지 Ⅷ

(개별 지방채 발행사업 추진현황)

사업명

고현 도시재생 뉴딜사업

‘신(新)고현 이음으로 다시 날다’

담당자

투자지원과

이혜진(☎639-4613)

이승우(☎639-4614)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 구도심에 거점 공간을 조성하여 중심 기능을 회복하고 구도심 상권 활성화 도모에 따른 도심 활력 회복

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. ~ 2024.

○ 위    치 : 고현동 33-30번지 일원

○ 사업내용 : ‘이음’센터 및 광장 조성, 이음길 조성, 범죄제로 보행환경개선, 주민역량강화 및 성과관리

□ 소요재원 및 사업비 현황

○ 총사업비 :32,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	투자(편성)액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	32,100	17,914	5,203	8,983	-
국 비	15,000	8,770	2,192	4,038	-
시 도 비	3,000	1,754	438	808	-
시군구비	12,600	7,390	1,073	4,137	-
지 방 채	1,500	-	1,500	-	-

□ 추진상황(진행중 및 공정률 : 60 %)

○ 2019. 10. : 도시재생 공모사업 선정(국토교통부)

○ 2020. 01. : 도시재생활성화계획 고시

○ 2020. 06. : 이음센터 건축물 보상 및 등기이전 완료

○ 2020. 11. : 범죄제로 보행환경 개선사업 공사 준공

○ 2021. 08. : 이음센터 및 광장 조성사업 실시 설계용역 착수

○ 2021. 11. : 이음센터 및 광장 조성사업 주민설명회 개최

○ 2022. 06. : 가로환경 개선상버 버스킹 시설 등 설치

○ 2022. 09. : 신(新)고현 이음길 경관협정 체결 및 승인

○ 2023. 05. : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 계약완료 및 착공

○ 2023. 05. ~ : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 진행 및 수시 점검

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 이음센터 및 광장 조성사업 공사 준공 예정

사업명

행정타운 조성사업

담당자

도시계획과 김형진

(☎639-4445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 각종 공공청사 시설의 심각한 노후화 등으로 각종 사건·사고에 신속한        대처 애로

○ 옥포동 산177-3번지 일원에 공공청사 등을 건립하여 질 높은 대민서비스       제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.04.01. ~ 2024.12.31.

○ 위 치 : 옥포동 산177-3번지 일원

○ 규 모 : A=96,847㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 57,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	57,960	52,024	356	306	5,274
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,070	9,134	356	306	5,274
기 타	37,890	37,890	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2020.03. : 민간사업 협약 체결

○ 2020.04. : 착공계 제출

○ 2024.04. : 분쟁해결을 위한 중재신청서 제출

□ 향후계획

○ 2024.12. : 중재원 중재 판결 및 잔여공정 추진

사업명

거제중앙 공공하수처리시설 증설사업

담당자

상하수도과 김성훈

(☎639-4913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 하수도정비 기본계획(변경)에 반영된 3,4단계 하수처리시설 증설       사업(3단계 13,000㎥/일, 4단계 11,000㎥/일) 통합 시행(24,000㎥/일)으로       처리구역 내 적정 하수 처리를 통한 공중위생 향상 및 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2023. 12.(5년)

○ 위 치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원

○ 규 모 : 공공하수처리시설 증설 Q=24,000㎥/일, 중계펌프장 증설 Q=36,000㎥/일,

압송관로 매설 L=4.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70,479백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	70,479	37,291	24,383	8,805	-
지 방 채	14,000	-	14,000	-	-
국 비	17,061	13,344	2,015	1,702	-
시 도 비	8,530	6,672	1,008	850	-
시군구비	9,301	2,275	7,026	-	-
기 타	21,587	15,000	334	6,253	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 07. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2020. 03. : 재원협의 및 설치인가 완료

○ 2020. 08. : 공사 착공

○ 2023. 09. : 시운전 시작

○ 2024. 02. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음