□ 주요 투자사업 추진현황

우리 거제시에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
옥포국가산업단지 복합문화센터 건립	4,175	1,072	3,103	-	-	2023	2021	100
중소형 조선소 생산 기술혁신(DX)센터 구축사업	26,400	1,400	3,500	6,100	15,400	2027	2023	15
2019년 능포지구 새뜰마을사업	2,355	1,935	409	-	-	2023	2021	100
죽도국가산업단지 활력있고 아름다운 거리 조성사업	2,110	1,367	743	-	-	2023 준공 완료	2021	100
어촌뉴딜300사업 (도장포항)	9,116	9,116	-	-	-	2024	2019	70
어촌뉴딜300사업 (산전항)	10,911	10,911	-	-	-	2024	2019	100
어촌뉴딜300사업 (예구항)	9,768	9,768	-	-	-	2024	2019	70
어촌뉴딜300사업 (저구항)	8,713	8,713	-	-	-	2024	2019	100
어촌뉴딜300사업 (여차항)	10,369	6,221	4,148	-	-	2025	2020	70
어촌뉴딜300사업(성포항)	9,175	5,671	3,504	-	-	2025	2021	70

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
사등권역 어촌뉴딜300사업	9,730	1,430	3,400	4,900	-	2025	2022	50
장목항 어촌 신활력 증진사업	31,000	-	2,700	2,900	25,400	2027	2023	10
장승포 Post-어촌뉴딜 시범사업	7,000	244	1,380	427	4,949	2025	2023	25
도장포 해금강 어촌신활력증진사업	10,000	-	93	1,000	8,907	2026	2023	11
제21회 해양경찰청장배 전국요트대회	100	-	-	100	-	2024	2023	100
학동흑진주 몽돌 해변 주차장 조성사업	6,500	-	-	6,500	-	2024	2023	50
씨릉섬 출렁다리 조성사업	7,310	7,310	-	-	-	2023	2022	100
거제문화예술회관 무대설비 시설개선공사	8,685	220	4,325	3,933	207	2025	2023	40
거제시 문화예술지원센터 건립	11,749	14	551	8,184	3,000	2025	2023	50
2023년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 운영	300	-	298	-	-	2023	2023	100
거제 시립박물관 건립	17,000	482	-	80	16,438	2030	2019	5

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
2023년 거제 문화재야행	440	-	420	-	-	2023	2023	100
장승포 365 전망대 조성사업	5,400	-	-	200	5,200	2026	2023	15
역사품은 섬, 화도캐슬 조성사업	5,000	-	-	500	4,500	2026	2023	10
오비 노을전망대 조성사업	4,870	-	-	310	4,560	2025	2023	10
웰니스 녹색해양생태정원 조성사업	5,500	-	-	4,300	1,200	2025	2023	10
흥남철수 기념공원 조성사업	15,000	5,490	7,310	2,200	-	2025	2018	40
도장포 관광버스 주차장 설치	16,000	5,248	4,000	2,902	3,850	2025	2020	40
파노라마형 서핑스테이션 조성	11,316	-	626	774	9,916	2026	2020	10
거제 반다비체육센터 건립사업	17,400	5,932	7,423	4,045		2024	2022 (재심사)	92
일운체육공원 조성사업	12,565	11,751	720	94		2023	2020	100

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
거제시 어린이교통공원 조성	6,958	5,450	1,508	-	-	2023	2022	100
사곡 사업용차량 공영주차장 조성	8,031	7,721	310	-	-	2023	2021	100
거제시 ITS 고도화 사업	3,331	1,994	1,337	-	-	2023	2021	100
상문동 주민센터 뒤 공영 주차장 조성	8,090	2,000	4,600	1,490	-	2025	2022	81
아주 공영주차장 조성사업	14,000	-	-	4,340	9,580	2026	2023	32
중곡 공영주차장 조성사업	5,300	-	100	5,200	-	2025	2023	7
덕포해수욕장 공영주차장 조성	6,000	-	-	100	5,900	2025	2023	1
신촌삼거리 상징탑 및 공원경관개선사업	3,000	-	-	-	3,000	2026	2023	10
2023 경남 정원박람회	514	-	264	250	-	2024	2023	100
거제시 종합사회복지관 이전신축	12,083	2,146	4,928	5,009	-	2024	2021	90

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
장승포동 다어울림 행복문화센터 건립 (생활SOC복합화사업)	6,600	38	1,168	5,394	-	2025	2020	20
거제시 장애인 종합복지관 리모델링	4,000	-	23	507	3,470	2025	2022	15
거제시립장승포도서관 재건축	8,500	2,104	1,631	4,765	-	2024	2020	76
아주천 생태하천 복원사업	10,615	636	496	5,615	-	2026	2022	40
도시활력증진 지역 개발사업	6,000	4,045	250	350	1,355	2025	2017	71
산달도 해안도로 정비공사	5,350	4,210	1,140	-	-	2023 완료	2017	100
상동4지구 도시계획시설 (완충녹지, 공원) 보상	4,720	-	4,720	-	-	2023	2022	100
신거제대교 진입관문 설치사업	3,146	-	16	130	3,000	2025	2023	0 설계 용역중
관포IC~임호간 도로확·포장 (시도12호선)공사	27,000	11,130	5,331	400	10,139	2026	2014	50

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
상동1초교 진입 도로(중로2-24,소로1-64호선)개설	5,328 (민간자본포함)	4,807	521	-	-	2023	2020	100
와현~예구간 (농어촌도로101, 302호선) 도로정비공사	4,900	2,292	1,500	1,108	-	2025	2020	70
상동도시계획도로 (중로2-13호선) 개설	25,000 (민간자본포함)	6,760	14,927	3,313	-	2024	2021	35
사등도시계획도로 (중로3-3호선) 개설	5,291	641	300	1,500	2,850	2026	2021	10
상동도시계획도로 (중로2-23호선) 개설	8,700	3,400	4,150	700	450	2026	2021	70
지방도1018호선 (용산교차로~ 삼룡초교앞)도로 확·포장공사	9,000	1,500	3,500	200	3,800	2025	2021	40
상문도시계획도로(대로2-2, 중로 1-31호선) 개설	33,736	82	6,300	9,500	17,854	2026	2022	5
거제공고 앞 교차로 개선공사	2,900	30	970	1,900	-	2024	2022	50
가조도 회주도로 (시도15호선)굴곡도로 개선사업	4,800	-	-	-	4,800	2027	2022	10

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
수양도시계획도로 (대로3-9호선) 개설	7,455	5,100	40	100	2,215	2025	2022	5
수월도시계획도로 (소로3-85호선) 개설	45,000	0	2,180	200	42,620	2030	2022	5
일운도시계획도로 (중로3-18호선) 개설	4,840	40	200	1,300	3,300	2025	2022	10
시도12호선(장목유호)굴곡도로 개량공사	1,300	-	1,000	300	-	2024	2022	60
연담~학동(2) 도로확포장(지방도1018호선)공사	3,930	200	2,000	500	1,230	2025	2021	20
연초도시계획도로 (중로3-13호선) 개설	5,500	0	60	200	5,240	2025	2023	10
수양도시계획도로 (소로2-149호선)개설	2,900	1,400	0	700	800	2025	2023	20
고현도시계획도로 (소로1-C호선) 개설	5,330	0	0	50	5,280	2026	2023	5
상동도시계획도로(소로2-97호선) 개설	4,500	0	0	50	4,450	2026	2023	5

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
연초도시계획도로(소로1-66호선) 개설	2,540	0	40	700	1,800	2026	2023	10
옥산도시계획도로(소로2-24호선) 개설	2,000	0	50	100	1,850	2025	2023	10
와현도시계획도로(중로3-A호선, 3-B호선) 개설	4,800	0	0	150	4,650	2027	2023	10
일운도시계획도로(중로3-11호선) 개설	2,500	730	0	100	1,670	2026	2023	5
고현동 복합 커뮤니티센터 신축	31,200	5,451	1,013	5,286	19,450	2027	2023	50
장목면사무소 신축	10,000	200	-	3,000	6,800	2026	2023	40
고현동 주차장 조성	6,500	500	-	-	6,000	2026	2023	20
거제시 농업기술센터 청사이전	19,220	18,774	446	-	-	2023	2019	100
반려동물놀이터조성사업	2,834	572	1,095	967	200	2026	2021	85

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
거제숲소리 공원 모노레일 설치사업	2,500	300	1,054	1,146	-	2024	2022	80
거제 동부면 율포지구 농촌공간 정비사업	9,000	-	-	4,261	4,739	2027	2023	10
먹거리 통합지원센터 (공공급식 지원센터) 건립	4,400	2,518	1,882	0	0	2023	2019	100
고현동 로컬푸드 복합 커뮤니티 건립	3,761	5	542	3,214	0	2024	2020	80
도란도란 컬쳐앤푸드센터 (생활SOC 복합화사업)	3,800	58	146	2,596	1,000	2025	2021	36
거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득	5,800	2,866	1,042	720	1,172	2025	2020	80
거제식물원 습지생태관 조성	2,000	98	815	1,087	-	2024	2021	98
농업개발원 시설 개선사업	3,000	-	-	1,600	1,400	2025	2023	17
관내 배수지 위생관리 개선사업	7,598	7,598	-	-	-	2024	2021	95

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후
거제시 하수준설토 처리시설 설치사업	3,000	500	2,500	-	-	2025	2024 (제4차)	20
오비마을회관 신축	2,000	-	-	200	1,800	2025	2023	5 (‘24년 추진)
중촌마을 어린이공원 조성사업	2,000	-	-	200	1,800	2025	2023	10 (‘24년 추진)
연초도시계획도로 (중로2-40호선 외 3개소) 개설	5,000	-	25	775	4,200	2025	2023	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업

우리 거제시에서 ‘23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
고현도시재생뉴딜사업	32,100	1,500	15,000	3,000	12,600	-	1,500	60
행정타운 조성사업	57,960	5,000	-	-	15,070	37,890	5,000	60
거제중앙 공공하수 처리시설 증설사업	70,479	14,000	17,061	8,530	9,301	21,587	14,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2023년에 추진한 사업