별지 Ⅶ

(개별 투자심사사업 추진현황)

사업명

상권활성화사업

담당자

지역경제과 제미정

(☎639-4123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 지역 상권 재도약을 위한 종합지원을 통해 소상공인 및 지역경제 발전에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : (최초) 2025.1.～2027.12.(3년) + (추가) 2028.1.～2029.12.(2년)

○ 위  치 : 경상남도 거제시 거제중앙로 17길 6 일원

○ 사업체수 : 584개소(영업점포 560개, 빈점포 24개)

○ 사업규모 : 상권자율구역 146,449.8㎡(상업지역 100%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,000	-	-	1,378	6,622
국 비	4,000	-	-	689	3,311
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	689	3,311
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2024. 09. : 지방재정투자심사

○ 2024. 11. : ‘25~’29 중기지방재정계획

□ 향후계획

○ 2025. 01. ~ 12. : 1차년도 사업시행

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

중소형 조선소 생산기술혁신(DX)센터 구축사업

담당자

조선지원과 정재훈 (☎639-4153)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선업 회복에 발맞춰 생산 경쟁력을 획기적으로 향상시키고, 중소형 조선소의 기술 혁신을 통해 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 선점

○ 중소형 조선소 및 블록 제조사의 생산 공정 스마트화를 통해 원·하청 간 동반성장을 촉진

○ 생산 공정의 스마트화를 기반으로 생산 인력 부족 문제를 해결하고, 원가 절감을 추진함으로써 지속 가능한 산업 생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2027.

○ 위 치 : 거제시 장목면 장목리 640-2 일원

[KRISO 해양플랜트산업지원센터 內 유휴부지(6,381㎡)]

○ 규 모 : 연구동 1,702.36㎡ 4층, 실험동 2,537.83㎡ 2층

(연면적 4,240.19㎡, 부지면적 6,381㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	26,400	4,900	6,100	5,100	10,300
국 비	10,000	1,500	2,100	2,100	4,300
시 도 비	7,500	1,000	2,000	1,500	3,000
시군구비	8,900	2,400	2,000	1,500	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2024. 09. : 기본 및 실시설계

○ 2024. 12. : 건축허가 완료 및 시공사 선정

□ 향후계획

○ 2025. 03. : DX 센터 착공

○ 2026. 06. : 생산기술혁신(DX) 센터 구축 완료

사업명

선박용 액체수소 실증설비 구축

담당자

투자지원과 정은주

(☎639-3243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 액체수소 운반선·추진선 핵심시스템 자체 개발과 주요기자재 국산화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2028.

○ 위 치 : 연초면 오비4길 21-36(한국조선해양기자재연구원 내)

○ 규 모

- 액체수소 운반선 · 추진선 극저온 기자재 육상실증센터 및 설비 구축

- 극저온 기자재 성능 · 안전성 평가 인증 체계 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	19,500	-	1,600	4,600	13,300
국 비	10,000	-	1,500	2,200	6,300
시 도 비	2,850	-	30	720	2,100
시군구비	6,650	-	70	1,680	4,900

※ 토지(2,640㎡), 건물(171㎡) 등 현물은 별도(2,700백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2024. 10. : 중앙투자심사 완료

○ 2024. 11. : 중기지방재정계획 심사 완료

○ 2024. 12. : 업무협약 체결(한국조선해양기자재연구원 ↔ 거제시)

○ 2024. 12. : 액체수소 실증설비 기본설계 및 사업부지 토목공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. : 사업부지 토목공사 준공, 장비(배관, 탱크 등) 발주

○ 2026. : 장비(배관, 탱크 등) 설치, 극저온 기자재 시제품제작 지원 등

○ 2027. : 시험‧평가‧인증, 각종 인허가 수행 등

○ 2028. : 육상실증센터 운영 및 기업 대상 시험‧평가‧인증 서비스 확대 제공

사업명

어촌뉴딜300사업(여차항)

담당자

해양항만과 김민우(☎639-4204)

해양항만과 김진호(☎639-4205)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출

○ 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 거제시 남부면 여차항 일원

○ 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,369백만원(* 민간자본 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,369	6,221	4,148	-	-
국 비	7,257	4,354	2,903	-	-
시 도 비	975	560	415	-	-
시군구비	2,137	1,307	830	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	14	14	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2022. 03. : 기본계획 고시

○ 2023. 09. : 공사 착공(토목)

○ 2024. 08. : 공사 착공(건축)

□ 향후계획

○ 2025. 12. 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

어촌뉴딜300사업(성포항)

담당자

해양항만과 김민우(☎639-4204)

해양항만과 김진호(☎639-4205)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출

○ 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 거제시 사등면 성포항 일원

○ 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,760백만원(* 민간자본 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,760	5,252	3,504	-	-
국 비	6,132	3,675	2,453	-	-
시 도 비	788	473	315	-	-
시군구비	1,840	1,104	736	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	415	415	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2021. 11. :　기본계획 고시

○ 2023. 12. : 공사 착공(건축, 토목)

□ 향후계획

○ 2025. 12. 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

어촌뉴딜300사업(사등권역)

담당자

해양항만과 김민우(☎639-4204)

해양항만과 김진호(☎639-4205)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화를 통한 지속 가능한 일자리 창출

○ 생활근거지 어촌어항재생으로 어촌주민의 삶의 질 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년

○ 위 치 : 거제시 사등면 유교·광리항 일원

○ 규 모 : 어업환경 및 정주여건 개선, 경관개선, 지역역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,730백만원(* 민간자본 제외)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,730	1,430	3,400	4,900	-
국 비	6,811	1,001	2,380	3,430	-
시 도 비	876	129	306	441	-
시군구비	2,043	300	714	1,029	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	373	-	-	373	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2022. 12. : 기본계획 고시

○ 2024. 12. : 공사 착공(건축, 토목)

□ 향후계획

○ 2026. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장목항 어촌신활력증진사업

담당자

해양항만과 김민우(☎639-4204)

해양항만과 김진호(☎639-4205)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가어항 기반 수산업 거점 경제 구축을 통한 지역소멸 위기 대응

○ 교육, 문화, 복지, 의료 등 생활 플랫폼 지원, 어촌신활력증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년

○ 위 치 : 거제시 장목면 장목항·황포항 일원

○ 규 모 : 청년창업지원센터, 수산컴플렉스, 경관개선, 지역역량강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	31,000	-	2,700	2,900	25,400
국 비	14,500	-	1,350	1,450	11,700
시 도 비	4,350	-	405	435	3,510
시군구비	10,150	-	945	1,015	8,190
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,000	-	-	-	2,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2023. 01. : 공모사업 선정

○ 2023. 11. : 지방재정 중앙투자심사 완료

□ 향후계획

○ 2025. 08. : 기본계획 고시

○ 2027. 08. : 공사 착공(건축, 토목)

○ 2028. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장승포 Post-어촌뉴딜 시범사업

담당자

해양항만과 이 율

(☎639-2403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구가 감소하는 어촌지역에 생활서비스 확충, 관계인구 확보를 통해 어촌 생태계를 구축하는 지속가능한 어촌 재생사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4개년)

○ 위 치 : 장승포·능포

○ 규 모 : 장승포·능포 일원 및 배후지역 7.57㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	7,000	1,720	-	5,280	-
국 비	4,900	1,204	-	3,696	-
시 도 비	630	154	-	476	-
시군구비	1,470	362	-	1,108	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2022. 09. : 업무협약(거제시↔앵커조직)

○ 2023. 04 : 마스터플랜 및 기본계획 수립용역 착수

○ 2024. 03. : 어촌스테이션 조성계획 전면 재검토

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 마스터플랜 및 기본계획 심의(조건부)

○ 2025. 04. : 기본계획 고시

○ 2025. 08 : 실시설계 준공

○ 2025. 09. : 공사착공

사업명

도장포권역 어촌신활력사업

담당자

해양항만과 이 율

(☎639-4203)

□ 사업목적 및 필요성

○ 돌봄, 교육, 문화, 복지 등 어촌 주민의 열악한 생활 서비스 개선하여 접근성을 향상, 주거환경 개선. 어촌 주민의 삶의 질을 회복

○ 관계인구 유입을 위해 어촌의 산업경제자원, 생태환경 및 경관자원 활용을 통한 어촌지역에 특화된 양질의 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ～ 2026년

○ 위 치 : 도장포, 해금강 일원

○ 규 모 : 앵커조직운영, 어촌사회혁신실험 추진, 링커조직 발굴 및 육성

어촌스테이션(돌봄,먹거리,건강) 조성, 일자리 창출시스템

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	93	763	1,000	8,144
국 비	7,000	65	535	700	5,700
시 도 비	900	8	68	90	734
시군구비	2,100	20	160	210	1,710
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2024. 06. : 업무협약(거제시↔앵커조직)

○ 2024. 07 : 마스터플랜 및 기본계획 수립용역 착수

○ 2024. 12. : 앵커조직운영계획 심의(반려)

□ 향후계획

○ 2025. 03. : 앵커조직운영계획 심의(조건부)

○ 2025. 04. : 마스터 플랜 및 기본계획 1차 자문

○ 2025. 08. 마스터플랜 및 기본계획 2차 자문

사업명

다목적 어업지도선 건조 사업

담당자

수산과 황수선

(☎639-4283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 행정선 신규 건조로 운항 안전성 확보 및 유지 관리비 절감

○ 각종 재난과 적조방제, 행정지원 등 신속한 컨트롤 타워 기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024. 11.(3개년)

○ 위 치 : 고현항

○ 규 모 : 1척, 45톤, 알루미늄 재질

○ 내 용 : 개념설계 용역, 선박 건조, 책임감리용역 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,799백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,799	1,805	2,994	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,799	1,805	2,994	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 09. 05. : 다목적 어업지도선 건조계획 수립

○ 2022. 11. 28. : 선박 건조 개념설계 준공

○ 2023. 02. 18. ~ 03. 30. : 협상에 의한 계약 입찰공고

○ 2023. 04. 11. : 제안서 평가위원회 개최(우선 협상 대상자 선정)

○ 2023. 04. 27. : 우선협상 대상자 기술협상 협의

○ 2023. 05. 12. : 전면책임감리용역 계약

○ 2023. 06. 23. : 다목적 어업지도선 건조 사업 착공

○ 2024. 05. 21. : 다목적 어업지도선 명칭(거제바다호) 선정

○ 2024. 11. 16. : 다목적 어업지도선 진수식 추진

○ 2024. 11. 29. : 다목적 어업지도선 준공 및 인수

□ 향후계획

○ 2025 ~ : 다목적 어업지도선 운항

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

공동생산시설지원

(친환경개체굴생산시설)

담당자

수산과 김선규

(☎639-4293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 굴 양식방법 다변화(연승수하식, 부유망식, 채롱식 등)로 굴 산업의 안정화

○ 소비자 기호에 맞는 우수한 개체굴 상품 개발로 높은 부가가치 창출 및 개체굴 우량종자 생산으로 어업인 소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 06. ~ 2024. 12.(2년 6개월)

○ 위 치 : 거제시 사등면 오량리 254-5, 259, 259-3

○ 규 모 : 개체굴 1차 육성 및 선별장 1식(720㎡), 개체굴 2차 육성 및 대량먹이생물 배양장 1식(3,083㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	1,998	1,658	340	-	-
국 비	999	829	170	-	-
시 도 비	180	149	31	-	-
시군구비	420	349	71	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	399	331	68	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 3. 공모 선정

○ 2023.12. 개체굴 1차 육성 및 선별장 준공

○ 2024. 3. 개체굴 2차 육성 및 대량먹이생물 배양장 준공

○ 2024. 5. ~ 8. 회계감사 실시 및 기타 장비 준공

○ 2024.12. 정산 보고

□ 향후계획

○ 개체굴 양식 기준 및 양식시설 표준화 마련으로 덩이굴 양식에서 개체굴 양식으로 전환 확대

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거제시 소규모 바다목장 조성사업

담당자

수산과 황수선

(☎639-4283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해역 특성에 적합한 기능성 어초시설 및 수산종자 방류로 해양 생태계 복원

○ 수산자원 회복으로 어업소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. ~ 2026. 12.(5개년)

○ 위 치 : 거제시 장목면 농소 ~ 이수도 해역

○ 규 모 : 1식

○ 내 용 : 인공어초 시설, 해조류 이식, 수산종자 방류 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원                               (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000	800	400	400	400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	600	240	120	120	120
시군구비	1,400	560	280	280	280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

○ 2022. 10. 21.: 한국수산자원공단 업무 위탁 협약 체결

○ 2022. 12. ~ 2023. 07.: 기본계획 수립 및 인공어초 적지조사 추진

○ 2024. 01. ~ 02.: 이수도 해역 인공어초 설치

- 십자주름어초(49개), 강제팔각반구형중형강제어초(2개)

○ 2024. 07. 22.: 이수도 해역 볼락 종자 방류(145,374미)

○ 2024. 08. ~ 09.: 이수도 해역 자연석시설(489㎥),

궁농해역 인공어초 설치(십자주름초 54개)

□ 향후계획

○ 2025. 07. 02.: 궁농해역 볼락 종자 방류(199,290미)

○ 2025. 06. ~ 12.: 관포 해역 인공어초 시설, 조피볼락 종자 방류,

환경 개선사업 추진 등

□ 사업변경 내역: 해당없음

사업명

다기능 환경정화선 건조

담당자

수산과 이동헌

(☎639-4303)

□ 사업목적 및 필요성

○ 리아스식 해안에 최적화된 다기능 환경정화선을 신규 건조하여 도서 및

해안에 유입된 해양쓰레기의 신속한 수거ㆍ처리로 효율적인 해안변 관리

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025 ~ 2027년(3년간)

○ 위 치 : 거제시 해안변

○ 규 모 : 다기능 환경정화선 1척(20톤급) 신규 건조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000	-	-	-	2,000
국 비	1,000	-	-	-	1,000
시 도 비	300	-	-	-	300
시군구비	700	-	-	-	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2023. 03. : 사업계획 수립(업무보고)

○ 2023. 09. : 중기지방재정계획 반영

○ 2024. 01. : 실시설계비 100백만원 예산 편성(시비)

□ 향후계획

○ 2025. 07 ~ 12. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2026. ~ 2027. : 국도비 확보 및 정화선 신규 건조

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 2,000백만원 외 실시설계비 100백만원 2024년도 예산 편성됨

사업명

수산업경영인 경남대회 개최

담당자

수산과 정민경

(☎639-4273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산업경영인 모임의 장을 마련하여 경남 수산인 화합 도모 및 상호 선진

어업기술 정보교류

□ 사업개요

○ 개최일: 2024. 5. 21.(수)

○ 위 치 : 거제종합운동장

○ 규 모 : 총2,500명 참석(수산업경영인, 시민 및 관광객 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	100	-	100	-	-
도 비	30	-	30	-	-
시 비	55	-	55	-	-
자 부 담	15	-	15	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 3. : 행사계획 수립

○ 2024. 5. : 제22회 경상남도 수산업경영인대회 개최

○ 2024. 7. : 사업 정산

□ 향후계획

○ 없음

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

거제문화예술회관 무대설비 시설개선공사

담당자

문화예술과 김민진

(☎639-3394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제문화예술회관의 노후된 무대설비시설 개선으로 공연장의 안전성 확보

및 시민의 문화복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~2025.

○ 위 치 : 거제시 장승로 145, 거제문화예술회관 대·소극장

○ 규 모 : 대·소극장 무대기계 및 배관배선 교체 등 무대설비 개선

※ 대극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총 51개), 하부무대시설(승강무대, 이동무대 총13개)

소극장 : 상부무대시설(무대막,조명,음향시설 총23개), 하부무대시설(회전무대 1개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,685백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,685	4,545	3,933	207	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	2,000	-	-	-
시군구비	-	2,545	3,933	207	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2020. 06. : 무대설비 시설개선 기본계획용역(거제시문화예술재단)

○ 2021. 09. : 대극장 무대설비 시설개선 실시설계 용역

○ 2022. 10. : 2023년 1단계 지방전환사업(시도보조) 20억 예산확보

○ 2023. 03. : 경남도 제1차 지방재정투자심사 승인

○ 2023. 09. : 대극장 무대기계장치 구매·설치 조달계약 체결

소극장 무대설비 시설개선공사 실시설계용역 완료

○ 2023. 12. : 대극장 음향반사판 구매·설치 조달계약 체결

○ 2024. 03. : 대극장 무대기계장치 및 음향반사판 등 철거완료

○ 2024. 04. : 대극장 무대기계장치 등 조립 및 현장시공

○ 2024. 07. : 소극장 무대기계장치 구매․설치 조달계약 체결

○ 2024. 09. : 대극장 무대조명시스템 및 무대바닥 조달계약 체결

○ 2024. 10. : 소극장 음향반사판 구매․설치 조달계약 체결

○ 2024. 11. : 대극장 준공 / 소극장 무대조명시스템 조달계약 체결

□ 향후계획

○ 2025. 04. : 소극장 시설 철거완료

○ 2025. 05. : 소극장 무대기계장치 등 현장 시공

○ 2025. 11. : 소극장 준공

사업명

거제시 문화예술지원센터 건립

담당자

문화예술과 김민진

(☎639-3394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제문화예술회관 별관동(구.호텔)을 복합 문화예술공간으로 전환,

지역의 문화예술인과 시민의 문화예술활동 공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. ~ 2025. 7.

○ 위 치 : 거제시 장승로 145, 거제문화예술회관 별관동(구.호텔)

○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 4,139.58㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,752백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,752	551	3,504	7,697	-
국비(균특)	2,000	-	1,000	1,000	-
시군구비	9,752	551	2,504	6,697	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2022. 07. : 거제문화지음 조성계획 수립

○ 2023. 02. : 도 지방재정투자심사 승인

○ 2023. 08. : 거제문화지음 건립, 2024년 지특예산 확보(10억원)

○ 2023. 09. : 주민설명회 개최

○ 2023. 12. : 거제문화지음 실시설계 완료

○ 2024. 01. : 거제문화예술회관 별관동 구. 호텔 내부철거 완료

○ 2024. 04. : 거제문화지음 건립 공사 경상남도 계약심사 이행

○ 2024. 06. : 거제문화지음 건립 공사 사업자선정 및 착공

○ 2024. 07. ~ 2025. 07. : 거제문화지음 건립 공사 현장 시공

□ 향후계획

○ 2025. 07. : 거제문화지음 건립 공사 준공

사업명

김영삼대통령기록전시관

주차환경개선사업

담당자

문화예술과 김연아

(☎639-3534)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 시설 방문객은 증가추세이나 주차공간이 부족하여 대형버스 등

도로변(갓길) 주차로 지역주민과 방문객이 안전사고에 노출됨

○ 성수기 최대 방문객 대응 및 지역 주민 불편 해소를 위해 주차공간 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2026 ~ 2027 (2년간)

○ 위 치 : 경상남도 거제시 장목면 외포리 1354-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 3,922㎡, 주차면 62대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원(전환 1,350(50%), 시비 1,350(50%))

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,700	-	-	-	2,700
시 도 비(전환)	1,350	-	-	-	1,350
시군구비	1,350	-	-	-	1,350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2024. 03. : 타당성 조사 및 기본계획 수립

○ 2024. 05. : 자체 지방재정 투자심사

○ 2024. 11. : 공유재산 관리계획 의회 의결

□ 향후계획

○ 2025. 06. : 2026년 주차환경개선사업 신청(경남도 교통정책과)

○ 2025. 08. : 도시관리계획 결정 용역 착수

○ 2025. 10. : 도시관리계획 결정 고시

○ 2026. 04. : 편입토지 보상절차 진행 및 실시설계 용역 착수

○ 2026. 08. : 실시계획 인가 등 관련 인‧허가

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2027. 08. : 주차환경개선공사 준공

사업명

거제 시립박물관 건립

담당자

문화예술과 유지현

(☎639-3403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시립박물관 건립을 통해 우리 지역의 역사를 알리고 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 및 균형발전

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014. ~ 2030.

○ 위 치 : 둔덕면 방하리 485-2번지 외 1필지

○ 규 모 : 부지면적 6,796㎡ 연면적 3,400㎡, 제1종 종합박물관 건립,

지하1층~지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,000백만원                              (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	26,000	484	50	50	25,416
국 비	10,400	-	-	-	10,400
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,600	484	50	50	15,016
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20 %)

○ 2016. 11. : 시립박물관 건립 기부채납(토지 및 현금 170백만원)

○ 2017. 01. : 시립박물관 건립부지 매입(방하리, 6,976㎡, 3억9천)

○ 2018. 11. : 문체부 공립박물관 건립 사전평가 통과

○ 2024. 09. : 거제 도시관리계획 변경 용역 시행, 중기지방재정계획 변경

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 도시관리계획 변경 결정 심의위원회(조건부 수용)

○ 2025. 03. : 건축기본계획 재수립 및 건축기획 용역 시행(투자심사 과업포함)

○ 2025. 11. : 도시관리계획 변경 결정 자문 심의회(조건부에 대한 검토)

○ 2026. 06. : 경상남도 도시관리계획 변경(결정), 지방투자 심사

○ 2026. 12. : 건축기획 심의, 설계공모 및 실시설계

○ 2027 ~ 2030 : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 (당초)96억원 (변경)260억원

사업명

거제 총명사 전통문화체험관 건립

담당자

문화예술과 유지현

(☎639-3403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통종교문화 체험시설, 종교화합을 위한 인프라 구축 등 종교문화시설 건립 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2025.

○ 위 치 : 거제시 신부로4길 40

○ 규 모 : 부지면적 3,833.40㎡, 전통문화체험관 건립, 연면적 374.45㎡, 지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,500	-	120	1,630	750
국 비	750	-	36	499.8	214.2
시 도 비	412.5	-	19.8	274.9	117.8
시군구비	962.5	-	46.2	641.3	275
지 방 채		-
민간자본(자부담)	375	-	18	214	143
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 2023. 12. 27. : 2024년 종교문화시설 건립사업 예산 확정 통지

○ 2024. 07. : 국고보조금 교부 신청

○ 2024. 08. : 재정투자심사 완료 및 24년 국고보조금 교부 통지

○ 2024. 09. : 거제시 중기지방재정계획 수립

○ 2024. 10. 14. : 사업자 선정 방법 승인(문체부)

○ 2024. 12. : 보조금 교부 결정 및 교부(시→ 총명사)

□ 향후계획

○ 2025. 4. : 25년 보조금 교부결정 및 교부통지(문체부, 경상남도 →시)

○ 2025. 6. : 설계용역 완료, 건축 허가 완료

○ 2025. 7. 11. : 지방보조금 교부 신청(총명사)

○ 2025. 08. : 공사 착공

○ 2026. 04. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 (당초)2024.~2025. (변경)2024.~ 2026.

사업명

파노라마형 서핑스테이션 조성사업

담당자

관광과 박가현

(☎639-4214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 보유한 해양레저 자원 간 네트워크 구축을 통한 시너지 효과 극대화

○ 액티비티한 관광체험 수요 증가에 따른 체험형 테마관광시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026. (4년)

○ 위 치 : 거제시 일운면 구조라리 671-3번지 일원

○ 규 모 : 연면적 2,097.92㎡ (플로우보딩 1식, 리버서핑 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,316백만원                             (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,316	626	774	2,200	7,716
시 도 비	7,248	406.9	503.1	1,430	4,908
시군구비	4,068	219.1	270.9	770	2,808

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 중,  20%)

○ 2020. 09. ~ 11. : 중기지방재정계획(자체) 및 투자심사(자체)완료

○ 2022. 03. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행

○ 2022. 10. : 경남도 지방재정투자심사위원회 심사(조건부-2단계 심사 이행)

○ 2022. 11. : 거제시 공유재산심의회 심의의결(원안가결)

○ 2022. 11. : 공유재산관리계획 수립 및 중기지방재정계획 변경

○ 2023. 10. : 기획심의(거제시 공공건축심의위원회)

○ 2024. 04. ~ 05. : 설계공모 선정 및 용역계약

○ 2024. 12. : 서핑설비 선정(협상에 의한 계약)

□ 향후계획

○ 2025. 05. : 건설기술심의 완료

○ 2025. 08. : 실시설계 준공 및 계약심사

○ 2025. 09. : 경상남도 지방재정투자심사위원회 의결(2단계)

○ 2025. 10. : 계약입찰 및 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공

사업명	오비 노을전망대 조성사업	담당자	관광과 김시현 (☎639-4214)
□ 사업목적 및 필요성 ○ 일상 속 관광 트렌드에 맞춰 시민과 관광객이 쉽게 접근할 수 있는 도심 속 관광 인프라 구축 필요 ○ 도심 근처 고현항의 경관을 활용한 특색 있는 전망대 및 휴식 공간 조성 ○ 무박 관광객이 79%에 달함에 따라 야경이 아름다운 전망대 조성으로 체류형 관광 유도 필요 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 12. (2년) ○ 위 치 : 연초면 오비리 산142-148번지 일원 ○ 규 모 : A=3,305㎡, 전망대 조성 1식(333㎡) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,870백만원 ○ 집행현황 : 해당 없음 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 2023. 09. : 용역비 2차 추경예산 반영 ○ 2023. 11. : 중기지방재정계획 및 투자심사 완료 ○ 2023. 12 : 「오비 노을 전망대 조성사업 기본계획 수립 용역」 시행 ○ 2024. 02. : 공유재산관리계획 시의회 의결 ○ 2024. 07. : 기본계획 수립 용역 완료 ○ 2024. 09. : 오비 노을 전망대 기본계획 수립 용역 결과 및 추진 검토 보고(대상지 사업추진 어려움에 따른 대체 사업지 검토 및 발굴 필요) □ 향후계획 ○ 대체 사업지 검토 및 발굴 - 조선소 야경과 고현항 일원이 조망 가능하고 접근성이 우수한 대상지 발굴 - 단순 전망공간 외 휴식·편의·주차공간이 복합된 공간 구성 필요 - 사업의 타당성 및 추진효과에 관해 충분한 검토 필요

사업명

장승포 365 전망대 조성사업

담당자

관광과 박가현

(☎639-4214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 장승포 지역에 조성된 야경과 함께 최신 트렌드인 야간관광 활성화를 위한 기반 조성

○ 주□야간 볼거리를 조성하여 방문객의 체류시간을 확대함으로써 지역활력 제고 및 지역경제 활성화 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2027. (4년)

○ 위 치 : 장승포동 79-2 일원

○ 규 모 : 6,790㎡

- 전망대(350㎡) 1식 및 부대시설(주차장 등) 조성(2,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,400	-	-	2,399	3,001
시 도 비	2,600	-	-	1,170	1,430
시군구비	2,800	-	-	1,229	1,571

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 계획설계 중, 15%)

○ 2023.  7. ~ 11. : 기본계획 수립용역 시행 및 완료

○ 2023. 11. : 지방재정 투자심사 및 중기지방재정계획 반영

○ 2023. 11. : 2024 경남도 관광자원개발사업 선정

○ 2024. 06. : 공유재산 심의회 및 공유재산관리계획 의결

○ 2024. 06. : 부지매입 의뢰

□ 향후계획

○ 2025. 05. : 계획설계용역 시행

○ 2025. 10. : 계획설계용역 완료

○ 2025. 11. : 실시설계용역 시행

○ 2026. 10. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

노자산 선셋브릿지 조성사업

담당자

관광과 박가현

(☎639-4214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 관광지를 기반으로 지역 자연공간 및 특색을 확용하여 천혜의 절경을 감상할 수 있는 국내 최장, 최고 규모의 출렁다리를 조성하여 남해안 대표 랜드마크로 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2027 (3년)

○ 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산103번지 일원

○ 규 모 : 출렁다리 조성 1식(L=450m, W=2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,036	-	-	671	13,365
시 도 비	9,082	-	-	395	8,687
시군구비	4,954	-	-	276	4,678

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 착수 전, 10%)

○ 2024. 07. : 기본계획 및 타당성조사 용역 완료

○ 2024. 10. : 경상남도 지방재정투사심사 완료(조건부-2단계)

○ 2024. 10. : 공유재산관리계획 승인

○ 2024. 11. : 2025년 경남도 관광자원개발사업 선정

○ 2024. 11. : 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

○ 2025. 07. : 실시설계용역 착수

○ 2026. 07. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

흥남철수기념공원 조성사업

담당자

관광과 정재욱

(☎639-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 흥남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 테마공원(미디어아트) 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2026.

○ 위 치 : 거제시 장승로 98일원

○ 규 모 : 기념공원 조성(전시관, 광장, 주차장재정비, 상징조형물 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	15,000	12,800	2,200	-	-
국 비	7,500	6,400	1,100	-	-
시 도 비	2,250	1,920	330	-	-
시군구비	5,250	4,480	770	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 04. : 전시설계 및 제작설치 착수

○ 2024. 07. : 구조보강공사 준공

□ 향후계획

○ 2025. 03. : 건축 리모델링공사 착공

○ 2025. 06. : 광장 조성공사 착공

○ 2025. 12. : 광장 조성공사 준공

○ 2026. 03. : 건축 리모델링공사 및 전시시설 제작ㆍ설치 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

도장포 관광버스 주차장 설치사업

담당자

관광과 정재욱

(☎639-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도장포 관광버스 주차장 조성을 통한 주차불편 해소 및 관광거제 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2026.

○ 위 치 : 거제시 남부면 갈곶리 309-1번지 일원

○ 규 모 : 주차장 조성(주차면 171면, 공중화장실 2개소, 승강기 3대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	16,000	9,248	2,902	3,850	-
국 비	8,000	2,150	2,000	3,850	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,000	7,098	902	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ 2023. 07. : 공사(총괄, 1차분) 착공

○ 2024. 06. : 공사(2차분) 착공

○ 2024. 10. : 공사(1차분) 준공

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 공사(잔여분) 착공

○ 2025. 11. : 공사(2차분) 준공

○ 2026. 03. : 공사(총괄, 잔여분) 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

이순신 승전지 순례길 프로젝트

(옥포대첩 첫 승전길 조성사업)

담당자

관광과 정재욱

(☎639-4193)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옥포대첩의 역사자원과 연계한 이순신장군 승전지 관광자원 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2027.

○ 위 치 : 거제시 옥포동 572번지 일원

○ 규 모 : 승전길 조성(전망광장, 243계단 리뉴얼, 야간경관개선사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,800	-	280	-	5,520
국 비	2,900	-	140	-	2,760
시 도 비	870	-	42	-	828
시군구비	2,030	-	98	-	1,932

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ 2024. 01. : 투자심사 완료

○ 2024. 05. : 사업부지 매입 추진

□ 향후계획

○ 2025. 06. : 실시설계용역 착수

○ 2025. 12. : 실시설계용역 준공

○ 2026. 02.~ : 공사 착공

○ 2027. 12.~ : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거제시 공공파크골프장 조성사업

담당자

체육지원과 김형진

(☎639-3915)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주 수요층인 노년층과 동호회 급증으로 전국적으로 조성 확산 추세에 있으나 현재 거제시에는 정식 파크골프장이 조성되지 않음

○ 비교적 배우기 쉽고 활동성이 높아 여가활동 및 생활체육 활성화를 위해  빠른 시간 내 정규 파크골프장 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 거제시 능포동 405-1번지 일원

○ 규 모 : 18홀 규모의 파크골프장 및 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,800	19	-	2,000	9,781
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,800	19		2,000	9,781
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 착공전)

○ 2023. 04. : 파크골프장 조성 기본계획용역 완료

○ 2023. 10. : 도시관리계획(시설:공원) 결정(변경) 및 공원조성계획(변경) 수립 용역 착수

○ 2024. 07. : 타당성검토 용역 준공

○ 2024. 09. : 공유재산관리계획 제출, 거제시 지방재정투자심사

○ 2024. 11. : 중기지방재정계획 반영(2025-2029)

□ 향후계획

○ 2025. 02. : 도시관리계획(시설:체육시설) 결정

○ 2025. 04. : 실시설계용역 착수

○ 2026. 03. : 공사 착공

사업명

거제 반다비 체육센터 건립

담당자

체육지원과 윤성훈

(☎639-3917)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근린생활형 국민체육센터 건립해 기존 체육시설과 연계한 생활체육공원 조성 및 부족한 체육시설 인프라 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. 05. ~ 2024. 02. 28.

○ 위 치 : 거제시 계룡로 149(고현동)

○ 규 모 : 부지면적 7,836㎡, 지상2층, 연면적 3,958㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 174백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	17,400	14,000	3,400	-	-
국 비	4,000	4,000	-	-	-
시 도 비	700	700	-	-	-
시군구비	12,700	9,300	3,400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024.02.28. : 준공

□ 향후계획

○ 운영중

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

산달도 해안도로 정비사업

담당자

해양관광과 이창석

(☎639-4634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산달연륙교 준공에 따른 방문차량의 증가에 반해 해안도로가 협소하여 불편이 가중되므로, 산달도 해안도로 확포장 및 정비를 통해 주민 및 관광객의 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 거제시 거제면 법동리 산달도 일원

○ 규 모 : 해안도로 L=2.25km, B=8m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,604	3,308	296	-	-
국 비	2,785	2,549	236	-	-
시 도 비	345	315	30	-	-
시군구비	474	444	30	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2019. 11. : 산달도 해안도로 정비공사(1차 구간) 준공

○ 2022. 06. : 산달도 해안도로 정비공사(2차 구간) 준공

○ 2024. 05. : 산달도 해안도로 정비공사(3차 구간) 준공

○ 2024. 05. : 산달도 해안도로 정비공사(잔여 구간) 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

학동흑진주 몽돌해변 주차장 조성사업

담당자

해양관광과 한정희

(☎639-4244)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학동흑진주 몽돌해변 이용객 편의 증대 및 지역주민 복리향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 10. ~ 12.

○ 위 치 : 동부면 학동리 589-7번지 외 1필지

○ 규 모 : 주차장 조성 A=3,776㎡(99면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,470	-	5,470	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,470	-	5,470	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 09. : 거제시 공유재산심의회 원안 가결

○ 2023. 11. : 지방재정투자심사위원회 심사

○ 2024. 06. : 공공용지 매입 완료

○ 2024. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2024. 12. : 주차장 조성 완료

□ 향후계획

○ 2025. 2. : CCTV 설치

○ 주차장 관리 및 유지보수

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거제시종합사회복지관 이전신축

담당자

사회복지과 유주연

(☎639-3713)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 복지 증진과 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2024. 4.

○ 위 치 : 거제시 양정동 1094-3번지 외 2필지

○ 규 모 : 대지면적 8,308㎡, 연면적 2,997㎡ (지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,073백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,073	7,126	4,947	-	-
국 비	1,553	922	631	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,520	6,204	4,316	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 02.  : 공사착공

○ 2022. 05. ~ 2023. 02. : 암파쇄관련 설계변경 시행 및 암파쇄 완료

○ 2023. 02. ~ 09. : 기초공사 및 골조공사 완료

○ 2023. 10. ~ 2024. 02. : 내외부 마감공사 및 부대토목 공사 추진

○ 2024. 04. : 공사 준공

○ 2024. 05. : 종합사회복지관 이전 및 개관

○ 2024. 06. 03. : 운영시작

□ 사업변경 내역

당초	변경	증/감
‘22. 2. 18 .~ ’24. 1. 16.	‘22. 2. 18. ~ ’24. 2. 29.	44일 연장

○ 공사기간 연장

사업명

거제시청소년복합체험문화시설 건립

담당자

아동청소년과 박성임

(☎639-4953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년의 균형 있는 성장을 위해 필요한 다양한 활동 프로그램을 누릴 수 있는 기본적인 여건 조성

○ 미래를 이끌어갈 다음 세대가 선호하는 여가·문화 활동 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2031.

○ 위 치 : 미정

○ 규 모 : 건축면적 2,534㎡, 연면적 7,496㎡/지상4층 규모

○ 주요시설

- 청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 등이 통합된 원스톱지원센터 건립

- 가상현실, 스포츠체험 등 청소년 선호도 조사를 통한 시설 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	33,550	-	29	-	33,521
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33,550	-	29	-	33,521
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023. 11. : 청소년복합체험문화시설 건립타당성 및 기본계획 수립용역 착수

○ 2023. 12. : 청소년복합체험문화시설 건립심의위원회 구성

○ 2024. 04. : 선진지 견학(전주시, 세종시)

○ 2024. 05. : 용역 최종보고회 개최

○ 2024. 09. : 2024년 제4차 자제 지방재정 투자심사 완료

○ 2024. 11. : 거제시 중기지방재정계획 수립(금액 수정)

□ 향후계획

○ 2025. 06. ~ 12. : 사업 부지 선정

○ 2026. 01. ~ 07. : 공공건축 기획용역, 사전검토(도), 건축기획심의

○ 2026. 07. : 2027년 지방전환사업 예산 신청

○ 2026. 08. : 설계공모 실시

○ 2027. 01. ~ 2027. 12. : 기본 및 실시설계/인허가 의제 협의

○ 2027. 04. : 2027년 제2차 중앙투자심사 신청

○ 2028. 08. / 2030. 12 : 착공 / 준공

○ 2031. 03. : 개관

□ 사업변경 내역

○ 사업 부지 재검토

사업명

장승포동 다어울림행복문화센터 건립(생활SOC)

담당자

노인장애인과 김영미

(☎639-3803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 동부권 문화시설의 부족 현상을 해결하고 다양한 문화‧복지‧체육공간을 시민들에게 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.

○ 위 치 : 경남 거제시 마전8길 15 일원

○ 규 모 : 부지면적 2,275㎡, 지하1층 지상1층 연면적 1,405.64㎡

(체육, 문화, 복지 복합 센터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,900	1,206	5,694	2,000	-
국 비	2,139	402	1737	-	-
시 도 비	761	391	370	-	-
시군구비	6,000	413	3587	2,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2023. 10. : 공공건축물 건축 협의

○ 2023. 11. : 경상남도 계약심사

○ 2023. 12. : 공사계약 및 착공계 제출

○ 2024. 11. : 사업계획 변경 및 계약심사(변경)

□ 향후계획

○ 2025. 08. : 준공

○ 2025. 09. ~ 12. : 내부시설 설치 및 개관준비

○ 2026. : 개관 및 운영

□ 사업변경 내역

○ 지반조사 결과 설계 당시 보다 지반 상태 불안정으로 인한 토공사(흙막이 가시설 추가설치) 기간연장 및 공사량 증가, 지반개량 공법 선정 및 공법 변경에 따른 사업비 및 사업기간 증가

○ 하절기 지속되는 폭염으로 인한 공사기간 연장

○ 집중호우로 인한 공사부지 연접 도로 및 공사 현장 피해발생에 따른 복구계획 수립 및 복구공사 시행으로 인한 공사비 증액 및 공사기간 연장

사업명

거제시장애인복지관 리모델링

담당자

노인장애인과 김민서

(☎639-3824)

□ 사업목적 및 필요성

○ 종합사회복지관 이전 후 전체 리모델링을 통해 장애인복지관으로 사용

○ 장애인에 대한 상담·여가·교육·직업훈련 등과 관련된 종합서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2026. 4

○ 위 치 : 거제시 양정1길 45

○ 규 모 : 연면적 5,004.96㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,250백만원

(단위 : 백만원, ’24년 12월 기준)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,250	330	200	5,500	1,220
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,750	330	200	5,000	1,220
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교)	500	-	-	500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 20%)
○ 2023. 05. ~ 12. : 건축기획용역, 공공건축 사전검토 및 심의
○ 2024. 05. : 실시설계용역 착수
○ 2024. 07. ~ 08. : 주민설명회 및 간담회 개최(이용자 의견수렴)
○ 2024. 12. : 특별교부세 확보(5억), 해체공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 복지관 임시이전(거제중앙로 1759)
○ 2025. 03. : 실시설계용역, 해체공사 준공
○ 2025. 05. : 리모델링 공사 착공

○ 2026. 04. : 리모델링 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	2022	2024
총사업비	40억	72.5억
공사일정	-	2025. 5. 착공 / 2026. 4. 준공

사업명

거제시립장승포도서관 재건축

담당자

평생교육과 배해현

(☎639-3875)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충

○ 소통·개방형 공간 확보로 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.1. ~ 2025. 2.

○ 위 치 : 거제시 신부로 36(장승포동)

○ 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 연면적 1,431㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원 (8,469백만원 집행)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,469	3,735	4,717	17	-
국 비	2,640	1,750	890	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,829	1,985	3,827	17	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2019. 09. : ‘20년 생활SOC 장승포도서관 리모델링 사업 선정

○ 2020. 02. : 사업계획 변경(리모델링→재건축) 승인(문체부)

○ 2020. 03. ~ 05. : 지방재정투자심사(道) 승인, 공유재산관리 계획(의회) 원안 가결

○ 2020. 11. : 2021년~2025년 중기지방재정계획(원안 가결)

○ 2021. 11. ~ 2022. 01. : 기존건물(857㎡) 철거

○ 2021. 08. ~ 2022. 07. : 구거 이설 공사

○ 2021. 08. 06. ~ 2022. 10. 20. : 설계 용역 시행

○ 2022. 04. : 건축계획변경 및 물가변동분 반영에 따른 사업비 변경(66억→85억)

○ 2022. 08. ~ 10. : 도 계약심사

○ 2022. 09. 20. : 사업계획 변경(사업비,면적 등) 승인(문화체육관광부)

○ 2022. 12. :  계약 및 착공(총괄 계약 후 1,2차 구분 공사)

○ 2024. 06. ~ 2024. 12. : 도서배가 작업 및 ICT 구축

○ 2024. 09. : 준공

○ 2024. 12. : 임시개관

□ 향후계획

○ 2025. 2. ~ : 정식 개관 및 운영

□ 사업변경 내역

○ 건축계획 변경 및 물가 변동분 반영에 따른 사업비 변경

구 분	당 초	현 재
총사업비	6,600백만원	8,500백만원
사업기간	2020 ~ 2023	2020 ~ 2025
사 업 량	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,900㎡	- 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡

사업명

(가칭)거제중앙도서관 건립

담당자

평생교육과 김진희

(☎639-3734)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙도서관 건립으로 도서관 정책 추진 컨트롤타워 역할 수행

○ 양질의 도서관 서비스 제공을 위한 독서 인프라 확충 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2029.

○ 위 치 : 거제시 상동동 148-1번지 일원(용산쉼터)

○ 규 모 : 부지면적 9,440㎡, 건축연면적 6,440㎡ (지하1층~지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	47,300	100	2,200	1,309	43,691
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	15,300	-	-	500	14,800
시군구비	32,000	100	2,200	809	28,891

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 12. 29. : 거제시 중앙도서관 건립 추진계획 수립

○ 2023. 02. 28. : 거제시 도서관 발전종합계획 수립 용역

○ 2023. 04. 18. : (문체부) 2023년 상반기 공공도서관 설립 타당성 사전평가 통과

○ 2023. 08. 31. : 거제중앙도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 2024. 10. 18. : 2024년 제3차 지방재정 투자심사 조건부 승인

□ 향후계획

○ 2025. 03. 24. : 추가편입부지 감정평가 결과 보고

○ 2025. 06. 12. : (가칭)거제중앙도서관 건립 전문가 자문단 위촉식 및 회의

○ 2025. 08. ~   : 2회 자문회의 및 건축 기획용역 중간보고

○ 2025. 11.     : 주민설명회 개최 및 공공건축 심의

○ 2025. 12. ~ 2026. 4. : 설계공모

○ 2026. 01. : 2026년 당초예산 사업비(토지보상비) 확보

○ 2026. 05. : 주민설명회 개최

○ 2026. 01. ~ 2027. 06. : 건축 기본 및 실시설계

○ 2027. 07. ~ 2029. 12. : 건축공사 착공 및 준공

○ 2029. 07. ~ 2029. 12. : 개관 준비 및 개관

사업명

조선산업 배후도시 활력증진사업

(도시활력증진지역 개발사업)

담당자

도시계획과 김재이

(☎639-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 야간경관 특화사업, 특색있는 거리 조성, 테마가 있는 콘텐츠 개발을 통해 쇠퇴한 지역 상권 회복과 관광인프라 구축

○ 공동체 활력 증진을 통해 불 꺼진 도시의 자생적 원기 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.

○ 위 치 : 장승포동 장승포항 일원

○ 규 모 : L=2㎞, 2.15㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	4,295	350	-	1,355
국 비	1,980	1,980	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,020	2,315	350	-	1,355
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

○ 2024. 10. 장승포항 수변공원 버스킹 행사 용역 외 2건

→ 2025. 4월 용역

□ 향후계획

○ 원형돔 설치사업(야관경관조명시설물 콘텐츠 설치 사업) 2026년도 예산 확보하여 사업 추진 예정

사업명

신거제대교 진입관문 설치사업

담당자

도시계획과 박영환

(☎639-4435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제~통영 방향 신거제대교 초입에 거제시의 진·출입구임을 알리고, 거제다운 정체성을 반영한 랜드마크형 진입관문을 설치하여 ‘미래 거제 디자인 도시’에 걸맞은 도시경관을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 8. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 사등면 오량리 992-4번지 일원

○ 규 모 : 진입관문 신규 설치(38,000mm × 16,000mm × 2,500mm)

기존 진입관문 조형물 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,146백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,146	-	16	130	-	3,000
국 비	-	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-	-
시군구비	3,146	-	16	130	-	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 추진상황(용역 추진단계 및 진도 : 100% / 공사 추진단계 및 진도 :０％))

○ 2023. 08. : 디자인 및 실시설계 공모

○ 2023. 11. : 작품접수 및 심사, 입상작 발표

○ 2023. 12. : 디자인개발 및 설계용역 계약 및 착수

○ 2024. 06. : 주민설명회

○ 2024. 09. : 경관위원회(경관자문)

○ 2024. 10. : 디자인안 최종 보고

○ 2024. 12. : 디자인개발 및 설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2026. 1. : 당초예산 확보

○ 2026. ~ : 공사 착공 및 준공

사업명

아주천 생태하천복원사업

담당자

건설지원과 이해준

(☎639-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아주천의 수질개선 및 수생태계 건강성 회복

○ 시민들에게 산책로, 생태학습장 등 자연친화적인 하천편의시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024.01.09. ~ 2026.01.07

○ 위 치 : 아주동 1564-1번지 일원(아주천)

○ 규 모 : 저수호안 L=2,650m, 낙차공 4개소, 비점오염저감시설 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,615백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,615	5,000	5,615	-	-
국 비	5,307	2,500	2,807	-	-
시 도 비	1,274	600	674	-	-
시군구비	4,034	1,900	2,134	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2024. 12.: 저수호안 정비 완료

□ 향후계획

○ 2025. 05.: 낙차공 4개소 설치

○ 비점오염저감시설 설치

○ 생태학습장 및 추이대 설치

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 자연석 붙임 A=10,252㎡

변경 : 자연석 붙임 A=1,953㎡, 전석쌓기 A=8,278㎡

사업명

상문동 주민센터 뒤 공영 주차장 조성

담당자

교통과 서지영

(☎639-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상문동 주민센터 행정수요 증가, 대단위 아파트 개발, 상업시설 확대 등 상동지구 도시팽창으로 인한 주차 수요가 급증하여 잔여 주차장 부지를 매입하여 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025

○ 위 치 : 상동동 172-6번지 일원

○ 규 모 : 지평식 주차장 조성 1식, 업무시설(창고) 1동 증축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,154	5,407	1,217	1,530	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,154	5,407	1,217	1,530	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2022. 06. 지방재정 투자심사 반영

○ 2022. 11. 편입토지 손실보상협의(22년분, 3필지) 완료

○ 2022. 11. 중기지방재정계획 반영

○ 2023. 02. 편입토지 손실보상협의(23년분 상반기, 1필지) 완료

○ 2023. 07. 잔여부지(6필지) 보상 협의(잔여지 6필지, 재산관리과)

○ 2023. 12. 실시설계용역 완료(토목, 건축, 전기, 통신)

○ 2024. 01. 공공청사 부지 보상 협의 의뢰(2필지, →재산관리과)

○ 2024. 03. 실시계획인가 및 소규모 재해영향평가 협의 완료

○ 2024. 12. 토지수용재결 신청(亡 2명, 2필지)

□ 향후계획

○ 2025. 01. 상속등기 완료 부지(2필지) 보상 완료

○ 2025. 02. 토지수용재결위원회 개최

○ 2025. 03. 실시계획(변경)인가 협의

○ 2025. 04. 잔여부지 등기이전 완료

○ 2025. 11. 준공

○ 2025. 12. 주차장 운영

사업명

아주 공영주차장 조성사업

담당자

교통과 서지영

(☎639-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 아주지역 도심지 내 부족한 주차공간 확충을 통해 인근 상권 활성화 및 시가지내 주차수급 여건을 개선하고 공공편익 서비스를 제공하기 위하여 경상남도 주차환경개선 지원사업을 통해 공영주차장 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026.

○ 위 치 : 아주동 1698-19번지 외 6필지

○ 규 모 : 주차타워 지하1층/지상4층, 연면적 6,853.26㎡, 대지면적 1,898㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	14,000	53	4,240	5,127	4,580
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	7,000		2,000	2,000	3,000
시군구비	7,000	53	2,240	3,127	1,580
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2023. 05. 경남도 지방재정 투자심사 조건부 반영

○ 2023. 07. 공유재산심의 위원회 심의(원안가결)

○ 2023. 11. 주차환경개선지원사업 선정(경남도 교통정책과)

○ 2023. 11. 거제시 중기지방재정계획 반영

○ 2024. 01. 도시관리계획(지구단위계획) 변경 결정(시설:주차장)

○ 2024. 02. 거제시 공공건축사업 건축기획 심의

○ 2024. 05. 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 06. 편입토지 보상 완료

○ 2024. 07. 장경간 구조 공법심의

○ 2024. 10. 주민설명회 개최

○ 2024. 12. 건축·경관공동위원회 심의(12.23.) - 조건부 의결

□ 향후계획

○ 2025. 02. 설계VE 용역 준공

○ 2025. 09. 공사비원가심사(조달청)

○ 2025. 09. 설계용역 준공

○ 2025. 10. 공사 착공

○ 2026. 12. 공사 준공

사업명

중곡 공영주차장 조성사업

담당자

교통과 서지영

(☎639-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 중곡지역은 주거·상업시설이 밀집된 구도심지로 외부유입 차량이 매우 많으나 주차장이 없어 불법 주□정차가 극심하여 공영주차장 조성으로 주차난 및 시민불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 고현동 986, 1000, 1006-3,4번지

○ 규 모 : 지평식 주차장 조성(3개소, 주차157면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,350	-	5,297	53	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,350	-	5,297	53	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 09. 공유재산관리계획 반영 및 공유재산심의(원안가결)

○ 2023. 11. 지방재정 투자심사 및 중기지방재정계획 반영

○ 2024. 03. 도시관리계획(시설:주차장) (변경)결정(2구역)

○ 2024. 08. 공사 착공

○ 2024. 12. 공사 준공

□ 향후계획

○ 2025. 02. 주차부스 및 출차주의등 설치

사업명

덕포해수욕장 공영주차장 조성

담당자

교통과 서지영

(☎639-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 덕포해수욕장 주차장 부족에 따른 교통체증유발로 지역주민 및 관광객 불편가중에 따라 주차공간 확보로 주차불편 해소와 관광객 유치 등 지역 경제 및 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026

○ 위 치 : 덕포동 368-1번지 일원

○ 규 모 : 지평식 공영주차장(7,255㎡, 188면) 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	-	54	2,246	3,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	-	54	2,246	3,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2023. 08. 부지 소유자 의견 조회

○ 2023. 09. 덕포해수욕장 공영주차장 조성사업 추진계획 수립

○ 2023. 09. 공유재산관리계획 반영 및 공유재산심의

○ 2023. 11. 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사 반영

○ 2023. 12. 실시설계용역 준공

○ 2024. 02. 도시관리계획(시설:주차장) 결정 용역 발주

○ 2024. 10. 보상열람계획공고

○ 2024. 11. 도시관리계획(시설:주차장) 결정 고시

○ 2024. 12. 건축(화장실 및 샤워실) 및 전기 용역 발주

□ 향후계획

○ 2025. 01. 편입토지 손실보상협의 진행

○ 2025. 07. 임시 주차장 활용(덕포해수욕장 개장 기간)

○ 2025. 10. 실시계획인가 등 행정절차 이행

○ 2026. 03. 공사 착공

○ 2026. 07. 공사 준공

사업명

중곡 주차타워 조성사업

담당자

교통과 서지영

(☎639-4543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 중곡지역은 주거·상업시설이 밀집된 구도심지로 외부유입 차량이 매우 많으나 주차장이 없어 불법 주□정차가 극심하며 이로 인한 교통사고 다발 지역임

○ 주차수용률이 높은 주차타워를 건립하여 불법 주□정차 해소와 해당 지역 상권을 이용하는 시민들의 안전과 공공편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. ~ 2027.

○ 위 치 : 고현동 1000번지

○ 규 모 : 주차타워 건립(지상 5층6단, 부지면적 1,500㎡, 149면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	12,600	500	-	400	11,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,500	-	-	200	5,300
시군구비	7,100	500	-	200	6,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2023. 04. 중곡 주차공간 확보 추진계획 수립(방침)

○ 2023. 11. 거제시 중기지방재정계획 반영

○ 2024. 03. 도시관리계획(시설:주차장) (변경)결정 고시

○ 2024. 09. 경남도 지방재정 투자심사

○ 2024. 09. 주차환경개선지원사업 선정

□ 향후계획

○ 2025. 04. 거제시 공공건축사업 건축기획 심의

○ 2025. 07. 기본 및 실시설계 용역 사업수행능력평가(PQ) 공고

○ 2025. 08. 기본 및 실시설계 용역 발주

○ 2026. 08. 공사 착공

○ 2027. 12. 공사 준공

사업명

거제 견내량 독수리 스마트복합쉼터 조성사업

담당자

교통과 이윤임

(☎639-4562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국토교통부 '2024년 일반국도 스마트 복합쉼터 조성사업'과 관련하여 국도14호선 도로 이용자들에게 안전하고 쾌적한 쉼터 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~2027.

○ 위 치 : 사등면 오량리 951-12번지 구(舊) 농수산물직판장 일원

○ 규 모 : 스마트 복합쉼터 조성 (부지면적 16,984㎡, 건축면적 1,317㎡)

- 편의시설 개선: 스마트화장실, 전기차충전기, 진출입로 개선 등

- 독수리전망대 신축: 월동 독수리 조망

- 견내량튜브 신축: 디지털갤러리, 미디어파사드 등 전시시설

- 기존 시설 리모델링: 휴게라운지, 향토식당, 특산물판매장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,000	-	18.7	411.3	8,570
국 비	2,000	-	6.5	193.5	1,800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,000	-	12.2	217.8	6,770
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2024. 03. ‘2024년 일반국도 스마트 복합쉼터 조성사업’ 공모 선정

○ 2024. 05. 경상남도 2024년 정기2차 지방재정 투자심사 반영

○ 2024. 06. 스마트 복합쉼터 조성 업무 협약(거제시-진주국토관리사무소)

○ 2024. 07. 거제도시관리계획(시설:광장) 결정(변경) 용역 발주

○ 2024. 08. 거제도시관리계획(재정비) 변경 결정(생산관리→계획관리)

○ 2024. 09. 건축기획용역 발주

○ 2024. 11. 거제시 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

○ 2025. 08. 공공건축 설계 공모

○ 2025. 08. 거제시 도시관리계획(시설:광장) 결정(변경)

○ 2025. 08. ~ 2026. 03. 기본 및 실시설계용역, 국유재산 손실보상 협의

○ 2026. 04. ~ 2027. 07. 공사 착공 및 준공

사업명

관포IC~임호간 도로확·포장

(시도12호선)공사

담당자

도로과 김동희

(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저도 개방과 더불어 농소해수욕장 등 방문하는 교통량의 증가로 도로의       선형개량 등을 통한 교통여건을 개선하여 애용객의 교통불편해소와 관광       이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.01. ~ 2026.12.

○ 위 치 : 장목면 관포IC ~ 농소해수욕장

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.54㎞, B=13.25m(2차로→3차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	27,000	15,031	400	200	11,369
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	380	380	-	-	-
시군구비	25,920	13,951	400	200	11,369
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2011. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2014. 08. : 투자심사 반영

○ 2015. 01. : 실시설계용역 완료

○ 2016. 03. : 도로구역 결정 고시

○ 2020. 04. : (1공구) 공사 준공 [농소해수욕장 일원(L=299.0m)]

○ 2022. 05. : (2공구) 공사 착공

○ 2024. 02. : (2공구) 공사 준공

□ 향후계획

○ 2025. 09. : 3공구 도로구역 결정(변경) 고시

○ 2025. 10. : 3공구 보상 실시

○ 2027. 01. : 3공구 착공 예정

○ 2027. 12. : 3공구 준공 예정

사업명

와현~예구간(농어촌도로101,302호선)도로정비공사

담당자

도로과 정상윤

(☎639-4624)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로

선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.01. ~ 2025.05.

○ 위 치 : 일운면 와현리 일원(와현해수욕장 ~ 예구마을)

○ 규 모 : 도로 확포장 L=1.242km, B=8.0~10.0m(2차로 및 보도 신설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,900	3,592	1,308	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,900	3,592	1,308	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 08. : 시 지방재정투자심사(적정)

○ 2020. 09. : 편입토지 등 손실보상 협의

○ 2020. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 고시 및 도로노선 지정(변경) 공고

○ 2021. 12. : 실시계획인가 고시

○ 2022. 05. : 공사 착공

○ 2023. 04. : 토지수용재결(지방토지수용위원회)

○ 2023. 04. : [총괄분 1회, 1차분 1회] 설계변경

○ 2024. 01. : 잔여분(2차분) 착공

□ 향후계획

○ 2025. 05. : 공사 준공

사업명

지방도1018호선(용산교차로~삼룡초교앞)도로확포장공사

담당자

도로과 김동희

(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대단위 아파트 건립, 거제 동서간 연결도로 개통(2022.01.)등에 따라 상습       교통정체 발생

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.01. ~ 2025.07.

○ 위 치 : 용산교차로(상문동주민센터 일원) ~ 삼룡초교 앞(대로3-9호선)

○ 규 모 : 도로 확포장 L=800m, B=27.4m→37.5m(4~5차로→6~8차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,700	5,000	200	500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,700	5,000	200	500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2020. 01. : 상문동 지역 발전 및 교통 해소방안 업무계획 수립

○ 2020. 09. : 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2021. 06. : 관계기관 협의

○ 2022. 01. : 보상계획 열람 공고

○ 2022. 05. : 편입토지 등 손실보상 협의(상행선)

○ 2022. 10. : 감정평가 실시(하행선)

○ 2023. 07. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 06. : 공사 준공

사업명

가조도 회주도로(시도15호선)굴곡도로 개선사업

담당자

도로과 김동희

(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬 등 지형적 특성에 따른 심한 굴곡으로 통행불편뿐만 아니라 가조도를       찾는 탐방객 및 주민 등 안전사고 위험이 높음에 따라

○ 도로를 이용하는 주민과 관광객의 안전사고 예방 및 차량통행 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.01. ~ 2028.12.

○ 위 치 : 사등면 창호리 가조도 회주도로(시도15호선)

○ 규 모 : 굴곡개량 L=1.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,800	-	-	200	4,600
국 비	2,400	-	-	100	2,300
시 도 비	1,200	-	-	50	1,150
시군구비	1,200	-	-	50	1,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :10%)

○ 2022. 07. : 사업계획 수립

○ 2023. 03. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 타당성조사용역 완료

○ 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시

○ 2024. 02. : 실시설계용역(보완) 착수

○ 2024. 03. : 25년 재해위험지역 정비사업(급경사지) 신규사업 신청

○ 2024. 10. : 2025년 재해예방사업 확정

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2025. 08. : 재해 및 환경영향평가 용역 착수

○ 2025. 12. : 사전 설계검토(市→道)

○ 2026. 01. : 도로구역 변경 결정 및 손실보상 협의

○ 2026. 12. : 공사 착공

○ 2028. 12. : 공사 착공

사업명

시도12호선(장목 유호)굴곡도로 개량공사

담당자

도로과 정상윤

(☎639-4625)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로의 심한 굴곡 등 기하구조 불량에 따른 교통사고 위험 상존으로

선형개량 등을 통한 주민불편 해소 및 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 당초 2022. 05. ~ 2024. 09.

○ 위 치 : 장목면 유호리 산78-5번지 일원

○ 규 모 : 굴곡도로 개선 L=370m, B=8.0~12.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2025년 이후
계	1,300	1,000	300	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	1,000	-	-	-
시군구비	300	-	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 02. : 특별조정교부금 배분 통지(1,000백만원)

○ 2022. 03. : 성립전 예산편성

○ 2022. 05. : 실시설계용역 착수

○ 2022. 08. : 지반조사용역 완료

○ 2022. 11. : 중기지방재정투자심사 승인

○ 2022. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2023. 02. : 도로구역 결정(변경)에 따른 협의

○ 2023. 08. : 도시관리계획 결정(변경) 및 도로구역 결정 고시

○ 2023. 08. : 공사 착공

○ 2023. 10. : 편입토지 손실보상 협의

○ 2024. 09. : 공사 준공

사업명

연담~학동(2)도로확포장(지방도1018호선)공사

담당자

도로과 김동희

(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한려해상국립공원 및 학동케이블카 접근을 위한 보조 간선도로로 심한 굴곡과 노폭       협소로 인한 사고위험 및 관광성수기 교통정체 해소

○ 거제케이블카 입구 일부 구간 미개설(1km)로 병목현상 발생과 케이블카 개통(2022.3.19.)과 남부권       관광객 증가에 따른 교통량 증가로 상습교통 정체 등 원활한 교통소통

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2025. 07.

○ 위 치 : 동부면 구천리 자연휴양림~학동고개(지방도1018호선)

○ 규 모 : L=1.0㎞, B=13.5~18.5m(2차로 → 3차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,930백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,930	2,165	500	1,000	265
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,730	1,965	500	1,000	265
시군구비	200	200	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021. 12. : 실시설계용역 계약 및 착수

○ 2022. 03. : 실시설계용역 완료

○ 2022. 12. : 소규모 환경영향평가 및 재해재해영향평가 용역 준공

○ 2023. 02. : 지방도사업 시행위탁 알림(경남도→시)

○ 2023. 02. : 보상업무 위수탁 협약서 송부(거제시→경남도)

○ 2023. 06. : 일상감사 및 계약심사

○ 2023. 07. : 1차분 공사 착공

○ 2024. 03. : 2차분 공사 착공

○ 2024. 12. : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ 2026. 01. : 잔여분 착공

○ 2026. 12. : 총괄분 공사 준공

사업명

문동~삼거 위험도로 개선

담당자

도로과 김동희

(☎639-4623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 문동∼삼거구간 도로 폭 협소, 심한 굴곡으로 교통사고 위험이 높아 선형개량으로 시거 확보 및 교통 환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 07. ~ 2027. 03.

○ 위 치 : 동부면 구천리 자연휴양림~학동고개(지방도1018호선)

○ 규 모 : L=1.0㎞, B=13.5~18.5m(2차로 → 3차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,800	-	630	2,016	1,154
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,335	-	315	996	24
시군구비	2,465	-	315	1,020	1,130
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2024. 08. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 07. : 주민설명회 개최

○ 2025. 08. : 재해 및 환경영향평가 용역 시행

○ 2025. 11. : 감정평가 및 손실보상 협의

○ 2025. 11. : 공사 착공

○ 2026. 03. : 도로구역 변경 결정 고시

○ 2028. 11. : 공사 준공

사업명

상동 도시계획도로(중로2-13호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.01.~2025.12.

○ 위 치 : 상동동 666-50번지 일원(고현초교~국도5호선 연결도로)

○ 규 모 : 도로개설 L=778m, B=15.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	26,000	6,760	14,927	3,313	1,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,073	6,760	8,000	3,313	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	6,927	-	6,927	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2021.09. : 실시설계용역 착수

○ 2022.01. : 보상계획공고(거제시 공고 제2022-175호)

○ 2022.11. : 1차분 공사 착공

○ 2023.04. : 실시계획인가 완료

○ 2023.05. : 2차분 공사 착공

○ 2024.05. : 2차분 공사 준공

○ 2024.06. : 3차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025.12. : 공사 준공

사업명

사등 도시계획도로(중로3-3호선) 개설

담당자

도로과 박수영

(☎639-4485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 사등면 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016.09.~2026.12.

○ 위 치 : 사등면 성포리 31-5번지 일원(항도마을 일원)

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,291	941	1,500	1,500	1,350
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,291	941	1,500	1,500	1,350
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016.09. : 실시설계 용역 완료

○ 2017.01. : 편입토지 분할 측량 시행

○ 2017.05. : 편입토지 손실보상 협의

○ 2021.10. : 지방재정투자심사(재심사)

○ 2022.06. : 보상계획 열람 공고(거제시 공고 제2022-1199호)

○ 2023.05. : 손실보상 협의(2차)

○ 2023.12. : 공사 착공(총괄분 및 1차분)

○ 2024.03. : 실시계획 인가 고시(거제시 고시 제2024-76호)

○ 2024.03. : 공사 착공(총괄분 및 2차분)

□ 향후계획

○ 2025.01. : 공사 착공(총괄분 및 3차분)

○ 2026.12. : 공사 준공

사업명

상동 도시계획도로(중로2-23호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 상동동 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021.05.~2026.12.

○ 위 치 : 상동동 214-1번지 일원(상동 승승삼겹 일원)

○ 규 모 : 도로개설 L=259m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,950	7,550	700	100	600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,950	7,550	700	100	600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021.05. : 실시설계용역 완료

○ 2021.10. : 지방재정투자심사(조건부 : 중기지방재정계획 반영)

○ 2021.11. : 보상계획공고(거제시 공고 제2021-2178호)

○ 2023.05. : 감정평가 및 손실보상 협의

○ 2024.05. : 손실보상 협의 완료

□ 향후계획

○ 2025.10. : 공사 착공

○ 2026.12. : 공사 준공

사업명

상문도시계획도로(대로2-2, 중로 1-31호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.02.~2029.12.

○ 위 치 : 상동동 311-2번지 일원(중로1-24호선~상문고)

○ 규 모 : L=1,100m, B=25m[2-2호선 왕복 4차로), B=15m[1-31호선]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,736백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	33,736	6,380	9,500	1,000	16,856
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	33,736	6,380	9,500	1,000	16,856
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022.01. : 상문동 일원 교통혼잡 개선방안 수립(대로2-2, 중로1-31호선 연장)

○ 2022.03. : 지방재정 투자심사(적정)

○ 2022.03. : 실시설계 용역 착수

○ 2022.07. : 1차구간 보상계획 열람 공고(제2023-1510호)

○ 2023.12. : 실시설계 용역 완료

○ 2024.09. : 2차구간 보상계획 열람 공고(제2024.1947호)

□ 향후계획

○ 2027.02. : 공사 착공

○ 2029.12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 편입토지 손실보상비 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 136억원 → 337억원]

사업명

수양도시계획도로(대로3-9호선)개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010.10.~2027.12.

○ 위 치 : 거제시 수양동 821번지(수월동 자이아파트 앞 ~ 해명교)

○ 규 모 : 도로개설 L=333m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	11,740	5,100	40	100	6,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,740	5,100	40	100	6,500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2010. 10. : 지방재정 투융자 심사 승인

○ 2012. 01. : 편입토지 등 손실보상 협의

○ 2023. 01. : 실시설계용역 착수

○ 2024. 11. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2026.01. : 실시계획인가 신청 및 도시개발사업자 보상추진 협의

○ 2027.07. : 공사 착공

○ 2027.12. : 공사 준공

사업명

수월도시계획도로(소로3-85호선)개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.01.~2030.12.

○ 위 치 : 수월동 산3-4번지 일원(수월마을 ~ 수월 체육공원)

○ 규 모 : 도로개설 L=2,000m, B=20m 4차로

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	45,000	2,180	200	-	42,620
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	45,000	2,180	200	-	42,620
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022.11. : 지방재정투자심사 완료

○ 2023.03. : 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2025.12. : 실시설계 용역 완료

○ 2026.02. : 도시관리계획 결정(변경) 추진 [노선 등급 및 연장 변경]

○ 2026.06. : 편입토지 손실보상 협의

○ 2027.08. : 도시계획시설사업 실시계획 인가

○ 2028.02. : 공사 착공

○ 2030.12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 도로 연장 및 폭 증가 등 총사업비 증가 예정[당초 34억원 → 700억원]

사업명

일운도시계획도로(중로3-18호선)개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 도로확장을 통해 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.02.~2027.12.

○ 위 치 : 일운면 옥림리 421번지 일원(옥림마을)

○ 규 모 : 도로개설 L=740m, B=10m [해안구간(210m) 국가사업(지세포항) 추진]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,840	40	1,500	200	3,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,840	40	1,500	200	3,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2021.07. : 도로개설건의 다수인민원 접수(상촌마을)

○ 2022.02. : 실시설계 착수

○ 2022.11. : 실시설계 완료

○ 2023.10. : 편입토지 손실보상 협의

□ 향후계획

○ 2027.02. : 공사 착공

○ 2027.12. : 공사 준공

사업명

연초도시계획도로(중로3-13호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 05. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 연초면 연사리 277-1번지 일원

○ 규 모 : L=476m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,000	-	66	600	5,334
국 비
시 도 비
시군구비	6,000	-	66	600	5,334
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023. 05 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2026. 12. : 손실보상 협의

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2028. 12. : 공사 준공

사업명

수양도시계획도로(소로1-149호선) 개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 도로확장을 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 05. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 양정동 781-3번지 일원

○ 규 모 : L=210m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,900	-	700	800	1,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	-	700	800	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2023. 05. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 09. : 손실보상 협의

○ 2024. 03. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 02. : 공사 착공

○ 25. 12. : 공사 준공

사업명

고현도시계획도로(소로1-C호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 고현동 1081-2번지 일원

○ 규 모 : L=211m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,330	-	-	50	5,280
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,330	-	-	50	5,280
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진사항

○ 2024. 01 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 실시설계용역 완료

○ 2026. 02. : 손실보상 협의

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

상동도시계획도로(중로2-97호선) 개설

담당자

도로과 옥새미

(☎639-4483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 상동동 187-11번지 일원

○ 규 모 : L=161m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,500	-	-	50	4,450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	-	50	4,450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2023. 01 : 2023년 시민과의 대화 건의 접수

○ 2024. 05 : 실시설계용역 착수

○ 2024. 10. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 10 : 도시계획시설 실시계획 인가

○ 2026. 01. : 손실보상 협의

○ 2027. 07. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

연초도시계획도로(소로1-66호선) 개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 도로확장을 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 02. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 연초면 오비리 198-2번지 일원

○ 규 모 : L=660m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,540백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,540	40	700	200	1,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,540	40	700	200	1,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2023. 02 : 실시설계용역 착수

○ 2024. 07. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 07. : 손실보상 협의

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

옥산도시계획도로(소로2-24호선) 개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 06. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 거제면 옥산리 산27-2번지 일원

○ 규 모 : L=676m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,000	50	-	100	1,850
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	50	-	100	1,850
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2023. 06 : 실시설계용역 착수

○ 2024. 12. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 06. : 손실보상 협의

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

와현도시계획도로(중로3-A호선, 3-B호선) 개설

담당자

도로과 박수영

(☎639-4485)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 06. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 일운면 와현리 423번지 일원

○ 규 모 : L=455m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,800	-	150	500	4,150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	-	150	500	4,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2023. 06. : 실시설계 용역 착수

○ 2023. 11. : 지방재정 투자 심사 승인(적정)

○ 2024. 07. : 실시설계 용역 완료

○ 2024. 11. : 보상계획 열람 공고(거제시 공고 제2024-2220호)

○ 2024. 12. : 도시관리계획(시설:도로) 결정

□ 향후계획

○ 2026. 03. : 재투자심사 예정(총 사업비 변경)

○ 2027. 01. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

일운도시계획도로(중로3-11호선) 개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 05. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 일운면 지세포리 746-4번지 일원

○ 규 모 : L=206m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,500	730	100	100	1,170
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	730	100	100	1,670
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014. 05. : 실시설계 용역 완료

○ 2015. 09. : 편입토지 손실보상 협의(1차)

○ 2024. 06 : 실시설계 보완 용역 착수

○ 2024. 09. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2025. 06. : 손실보상 협의

○ 2027. 02. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

사업명

동부도시계획도로(대로3-1호선) 개설

담당자

도로과 한민규

(☎639-4484)

□ 사업목적 및 필요성

○ 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현

○ 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 01. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 동부면 산양리 922-2번지(산양천 일원)

○ 규 모 : L=1,000m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,400	-	-	100	7,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,400	-	-	100	7,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 실시설계 용역 착수

○ 2025. 12. : 실시설계 용역 완료

○ 2026. 06. : 도시계획시설 실시계획 인가

○ 2027. 02. : 편입토지 등 손실보상 협의

○ 2028. 02. : 공사 착공

○ 2028. 12. : 공사 준공

사업명

장승포동 두모교차로 회전교차로 설치사업

담당자

도로과 김상희

(☎639-4493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교차로 내 원활한 교통 흐름 유도 및 교통사고 예방하여 운전자에게   쾌적한 도로 환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 장승포동 419-14번지 일원(두모교차로)

○ 규 모 : 회전교차로 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	280	-	280	2,720	-
국 비	-	-	-		-
시 도 비	140	-	140	1,360	-
시군구비	140	-	140	1,360	-
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-		-
기 타	-	-	-		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2024. 06. : 거제시 지방재정 투자심사 승인

○ 2024. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 02.~03. : 전문기관(한국교통연구원,한국도로교통공단) 자문 협의

○ 2025. 04. : 기본 및 실시설계용역

사업명

관내 배수지 위생관리 개선사업

담당자

상하수도과 서광진

(☎639-4893)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 배수지 시설 및 주변 위생관리 상태, 배수지 내부 시설물 개선을 통해 유충사고 등을 사전 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 관내 배수지 17개소

○ 규 모 : 배수지 내부 개보수 및 라이닝 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,598백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	7,598	7,598	-	-	-
국 비	3,799	3,799	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,799	3,799	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 10. : 거제시 노후배수지 정밀조사 용역 완료

○ 2020. 12. : 21년도 보조사업 예산 확정

○ 2021. 03. : 위생관리 개선사업 내역 조정 확정(66억원)

○ 2021. 10. : 위·수탁 협약(시 ↔ k-water)

○ 2022. 04. : 위생관리 개선사업 내역 조정(66억원 → 76억원)

○ 2022. 05. : 실시설계 용역 착수, 배수지 보수 착수(1차분)

○ 2022. 12. : 1단계 사업완료(k-water) 및 2단계 사업착수

○ 2023. 06. : 위·수탁 변경(사업비 변경)

○ 2024. 12. : 사업 완료

사업명

거제시 하수준설토 처리시설

설치사업

담당자

상하수도과 김재환

(☎639-4924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수도 시설 유지관리(준설) 과정에서 발생하는 준설토의 원활한 처리를

위한 처리시설(세척 및 탈수) 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. 8. ~ 2025. 4. 20.

○ 위 치 : 연초면 오비리 785번지

○ 규 모 : 일반철골구조 1식(지하1층, 지상1층), 준설토 처리시설 1식

부지조성(보강토옹벽, 역L형옹벽) 1식, 전기공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	3,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	3,000	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2022. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2022. 09. : 중기지방재정계획 수립

○ 2023. 04. : 기자재 선정 공법심의 완료

○ 2023. 07. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2023. 09. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2025. 04. : 공사 준공

사업명

중촌마을 어린이공원 조성사업

담당자

상하수도과 김숙경

(☎639-4913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제중앙 공공하수처리시설 주변지역 주민숙원사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 거제시 연초면 오비리 중촌마을 일원

○ 규 모 : 어린이공원 조성 A=3,107㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,400	-	40	-	2,360
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,400	-	40	-	2,360
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2024. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 09. : 도시관리계획(공원조성계획) 열람 공고

○ 2024. 10. : 도시관리계획(공원조성계획) 도시계획위원회 심의

○ 2024. 11. : 장애물없는 생활환경 예비인증(BF) 컨설팅용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 05. : 보상계획 열람공고

○ 2025. 12. : 실시계획인가 신청

○ 2026. 03. : 공사 발주

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

연초도시계획도로

(중로2-40호선 외 3개소) 개설

담당자

상하수도과 김숙경

(☎639-4913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중촌마을 내 도로 협소로 차량 교행에 불편 상존 및 화재발생 시 대형 차량 진입 애로로 주민들이 불편을 호소하는 실정에 따른 정주여건 개선 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 거제시 연초면 오비리 중촌마을 일원

○ 규 모 : 도시계획도로(중로 2-40호선 외 3개소) 개설 L=600m, B=8~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,105백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,105	50	3,125	326	1,604
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,105	50	3,125	326	1,604
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

○ 2023. 06. : 실시설계용역 완료

○ 2024. 03. : 보상계획 열람공고

□ 향후계획

○ 2025. 04. : 실시계획인 인가 신청

○ 2025. 10. : 공사 발주

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거제 치유의 숲 조성사업

담당자

산림과 김재현

(☎639-4353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민들의 생활 속 스트레스 저감과 심신의 안정 및 건강증진을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 거제시 반송재로 68-37

○ 규 모 : 치유센터(2층, 970.32㎡), 치유숲길, 치유욕장, 주차장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,300	5,000	3,300	-	-
국 비	300	300	-	-	-
시 도 비	1,950	2,950	-	-	-
시군구비	5,050	1,750	3,300	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 05. : 거제 치유의 숲 조성사업(건축, 토목) 준공

□ 향후계획

○ 2025. 05. : 거제 치유의 숲 개장

□ 사업변경 내역

○ 치유의 숲 부대시설(진입도로, 교량 등) 설치에 따른 사업비 변경

- 5,700백만원(’21년 투자심사) → 8,300백만원(’24년)

사업명

고현동 복합커뮤니티센터 신축

담당자

회계과 박성욱

(☎639-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 청사 신축을 통한 양질의 행정서비스 제공

○ 시민들의 여가, 문화서비스 공간 제공 및 도심지 주차 공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2028. 12.

○ 위 치 : 거제시 거제중앙로13길 24 일원(현. 고현동주민센터)

○ 규 모 : 복합 커뮤니티센터 건축(주민센터, 주민자치센터, 노인복지센터, 주거지주차장, 생활복지센터)

- 지하 2층 ~ 지상 4층, 연면적 8,432.66㎡(별동 증축 8,135.58㎡)

- 현청사 일부 보존(리모델링 297.08㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,200백만원(기존소유 토지비 54억원 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	31,200	6,463	3,304	226	21,207
국 비	1,250	562	688	-	-
시 도 비	2,050	30	49	113	1,858
시군구비	27,900	471	2,567	113	19,349
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(토지비)	-	5,400	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계 진행, 90%)

○ 2020. 09. : 생활SOC복합화사업 공모 선정

○ 2022. 04. : 공유재산관리계획 변경안 시의회 의결

○ 2022. 10. : 설계공모 당선작 실시설계용역 계약

○ 2023. 08. : 지방재정 중앙투자심사(재심사)

○ 2023. 11. : 중기지방재정계획 변경 반영

○ 2024. 12. : 매장유산 학술자문회의

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 매장유산 정밀발굴 전문가검토회의(국가유산청)

○ 2025. 05. : 매장유산 정밀발굴조사 및 문화유산위원회 심의

※ 문화재 매장유산 심의결과에 따른 사업계획 조정 이후

○ 2025. 08. : 각종 행정절차 변경

○ 2027. 02. : 설계용역 완료

○ 2027. 05. ~ 2028(예정) : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 매장유산 정밀발굴조사 및 문화유산위원회 심의 결과에 따라 사업계획(기간, 사업비 등) 재검토 및 변경(연장) 예정

사업명

장목면사무소 신축

담당자

회계과 박상현

(☎639-3513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 청사 신축을 통한 주민 복지 공간 조성 및 민원인 편의 제공

○ 양질의 행정서비스 제공 및 근무 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2023. 03. ~ 2027. 12.

○ 위 치 : 거제시 장목면 장목리 231-7번지 일원(현, 장목게이트볼장)

○ 규 모 : 토지매입, 면사무소 신축

- 부지면적 4,816㎡, 지상 3층, 연면적 1,600㎡ 내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000 백만원                             (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	10,000	200	2,160	320	7,320
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,000	200	2,160	320	7,320
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  도시계획시설(공공청사) 결정, 60%)

○ 2023. 04. : 부지선정 및 사업추진 건의(장목면)

○ 2023. 05. : 장목면 청사 신축 기본계획 수립

○ 2023. 09. : 공유재산심의회 심의 완료

○ 2023. 10. : 경상남도 제4차 지방재정 투자심사 승인

○ 2023. 11. : 공유재산관리계획 의결

○ 2023. 12. : 경상남도 공공건축지원센터 사업계획 사전검토

○ 2024. 01. : 장목면 청사 부지 매입 의뢰(재산관리과)

○ 2024. 05. : 토지보상협의(시유지 2필지 외 6필지 매입완료)

○ 2024. 10. : 건축기획 심의(거제시 공공건축 심의위원회)

○ 2024. 12. : 도시계획시설(공공청사) 결정

□ 향후계획

○ 2025. 04. : 설계공모 완료 및 기본 및 실시설계 착수

○ 2025. 12. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2026. 02. : 계약 심사 및 발주·착공

○ 2027. 12. : 준공 및 개소

사업명

고현동 주차장 조성

담당자

회계과 박성욱

(☎639-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고현동 도심 내 주차장 조성을 통한 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 :  2023. 04. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 거제시 거제중앙로13길 22 일원

○ 규 모 : 고현동 주차장 조성

- 부지면적 2,204㎡, 주차대수 약 66대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,500	500	-	-	6,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,500	500	-	-	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  사전행정절차 완료, 100%)

○ 2023. 04. : 주차장 조성 부지 확보 계획 수립

○ 2023. 09.~11. : 공유재산 심의 및 공유재산 관리계획 시의회 의결

○ 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2023. 11. : 지방재정투자심사(시) 완료

○ 2024. 12. : 토지손실보상 업무의뢰(→재산관리과)

□ 향후계획

○ 2025. 01~03. : 보상계획 공고(열람) 및 감정평가 시행

○ 2025. 04. : 손실보상 협의 진행

※ 전체 소유자 토지보상협의 완료 가능 시

○ 2025. 08. : 주차장 조성 실시설계용역 시행

○ 2026. 08. : 공사 착공

○ 2026. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 손실보상 협의 결과에 따라 이후 주차장 조성 시기 및 사업계획 변동 가능

사업명

연초면 공용 주차장 신축

담당자

회계과 박상현

(☎639-3513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 면청사 연접 부지 내 공용주차장 조성 필요 민원 지속 제기

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 9. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 연초면 죽토리 1104-8번지 일원

○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 1,800㎡, 철골 지주식, 주차대수 약 63면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,200 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	6,200	-	-	1,500	4,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,200	-	-	1,500	4,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5 %)

○ 2024. 09 : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산심의

○ 2024. 11. : 자체 지방재정 투자심사

□ 향후계획

○ 2025.12. : 실시설계용역 및 건축협의

○ 2026.02. : 철거 및 착공

○ 2026.12. : 준공

□ 사업변경 내역

○ 추진 사업의 경제성, 접근성, 효율성 등을 종합적으로 고려하여 사업 추진 여부 재검토 가능

사업명

스마트 빌리지 보급 및 확산사업

담당자

정보통신과 김태균

(☎639-4023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어르신들의 일상공간인 경로당에 건강관리, 생활 개선 등을 위한 실질적

디지털 인프라 필요

○ 의료기관이 부족한 지역을 대상으로 기초 의료․보건․복지정보 제공 등

복합적 스마트 복지 서비스 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.(2년)

○ 위 치 : 9개면 경로당 214개소

○ 규 모

서비스명	주요 사업 내용
경로당 주치의 건강관리 서비스	- 경로당 건강 측정(5종 장비, 12개 이상의 항목 측정) - 보건소 및 민간병원 측정 정보 제공
어르신 돌봄 여가․복지 서비스	- 경로당 맞춤 화상회의 장비 설비 - 복지상담, 비대면 교육, 여가 활동 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,740	1,260	1,480	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,190	1,010	1,180	-	-
시군구비	550	250	300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 06. : 2023년 스마트빌리지 사업 수행계획서 제출(한국지능정보사회진흥원)

○ 2022. 12. : 사업수행계획서 심의조정 및 확정

○ 2023. 03. : 사업 세부추진계획 수립 및 계약의뢰

○ 2023. 05. ~ 12. : 사업착수 및 완료

○ 2024. 04.  : 2024년 사업추진계획 수립

○ 2024. 05. ~ 12. : 사업착수 및 전체사업 완료

□ 향후계획

○ 시스템 안정화 및 운영 프로그램 개발

○ 동지역 경로당 확산 검토

사업명

반려동물놀이터 조성사업

담당자

농업정책과 조현광

(☎639-6363)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성장하는 반려동물 문화에 따라 시민의 눈높이를 맞추고 반려동물과 사람의 조화로운 생활을 위한 문화, 휴게공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2025년

○ 위 치 : 거제시 사등면 두동로1길 121 일원

○ 규 모 : 중소형견놀이터 1,170.5㎡, 대형견놀이터 765.6㎡, 주차장 1,251㎡(43면), 관리실 24㎡, 화장실 23.04㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,834백만원 (도비 150, 시비 2,684)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	2,834	1,572	1,262	-	-
시 도 비	150	150	-	-	-
시군구비	2,684	1,422	1,262	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 09. : 반려동물놀이터 조성계획 수립

○ 2021. 07. : 반려동물놀이터 및 진입도로 실시설계용역, 인허가 협의 등

○ 2021. 09.:  반려동물놀이터 착공

○ 2023. 05. : 반려동물놀이터 및 진입도로 1차분 준공, 2차분 착공

○ 2024. 12. : 반려동물놀이터 진입도로 2차분 준공

□ 향후계획

○ 2025. 02. : 반려동물놀이터 시범운영

○ 반려동물이 뛰어 놀 수 있는 공간을 제공하여 동물복지 실천과 반려동물 문화의식 상승을 위한 활동 연계하여 추진 등

○ 반려동물놀이터 활성화를 위한 사업 연계 추진 등

사업명

동부면 율포지구 농촌공간정비사업

담당자

농업정책과 심희연

(☎639-6345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농림축산식품부 주관 2023년 농촌공간정비사업 공모에 선정된 사업으로  농촌공간계획 기반 농촌 공간 재구조화에 필요한 유해시설의 정비 및 정주환경개선 사업을 지원하여 농촌공간의 재생을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027(5년)

○ 위 치 : 경상남도 거제시 동부면 율포리 일원

○ 규 모 : 정비대상시설 12,000㎡(정비지구 921,979㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	9,900	-	4,261.5	1777.5	3,861
국 비	4,500	-	855	675	2,970
시 도 비	1,350	-	256.5	202.5	891
시군구비	4,050	-	3,150	900	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2024. 03. : 기본계획 수립 착수

○ 2024. 05. ~ 06. : 사업대상지 선매입 승인 및 손실보상 완료

□ 향후계획

○ 2025. 07. : 기본계획 승인

○ 2025. 08. : 시행계획 수립 착수

○ 2026. 05. : 공사 착공

○ 2027. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

고현동 로컬푸드

복합커뮤니티 건립

담당자

농산물유통과 이성민

(☎693-6783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치 실현

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. 1. ~ 2024. 9.

○ 위 치: 거제시 고현동 986번지 일원

○ 규 모: 3층, 부지면적(1,266㎡), 건축연멱적(996.95㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,761백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,761	546	3,215	-	-
시 도 비	1,500	273	1,227	-	-
시군구비	2,261	273	1,988	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023. 03.: 실시설계 완료

○ 2023. 09.: 착공

○ 2024. 09.: 준공

□ 향후계획

○ 2025. 03. ~ : 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

도란도란 컬쳐앤푸드센터

(생활SOC복합화 사업)

담당자

농산물유통과 이성민

(☎693-6783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농가소득을 위한 새로운 플랫폼을 구축하고 먹거리를 통한 사회적 가치실현과 기존의 단일화된 농산판매장의 형태에서 벗어나 도시와 농촌지역의 상생을 위한 협력 공간 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 거제시 아주로3길 7

○ 규 모 : 4층, 부지면적(821㎡), 건축연멱적(1,162.96㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,800	204	1,922	1,674	-
국 비	500	77	400	23	-
시 도 비	1,040	4	553	483	-
시군구비	2,260	123	969	1,168	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2023. 11.: 실시설계 완료 및 건축허가

○ 2024. 01.: 착공

□ 향후계획

○ 2025. 06.: 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

거제식물원 주변 인프라 구축

공공용지 취득

담당자

공원관리사업소 윤기성

(☎639-6992)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제식물원의 확장과 농업개발원의 부족한 시설 확대, 거제섬꽃축제 등으로 향후 부족한 행사장 및 주차장 등 국비사업 배후 부지 확보를 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 거제시 거제면 서정리 908-2 등 34필지

○ 규 모 : 부지면적 28,714㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,800	3,906	839	-	1,055
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,800	3,906	839	-	1,055
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64.6%)

○ 매입대상 토지 28,714㎡

○ 매입완료 토지 18,564㎡

□ 향후계획

○ 토지주와 협상 후 잔여 부지 매입

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

아주2 근린공원 조성사업

담당자

공원관리사업소 이동훈

(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 여가시간 확대와 운동·산책 등 웰빙 문화 확산을 위한 공원 녹지공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026

○ 위 치 : 거제시 아주동 산170-11번지 일원

○ 규 모 : 근린공원 조성 A=19,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	4,200	239	9	1,000	2,952
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,200	239	9	1,000	2,952
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2022. 09. ~ 2023. 12. : 공원조성계획 및 실시설계용역 수행

○ 2023. 12.: 도시관리계획(공원) 및 공원조성계획 결정 고시

□ 향후계획

○ 2025. 08. : 공원조성계획 변경 결정 및 실시계획인가 신청

○ 2026. 04. : 지방재정 투자재심사(33억원⇒42억원)

○ 2026. 01. : 편입토지 손실보상

○ 2027. 01. ~ 12. : 공사착공 및 준공

사업명

양정근린공원 조성사업

담당자

공원관리사업소 이동훈

(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민들의 건강·휴양 및 정서생활의 기여, 도시의 자연환경을 보전하고 미세먼지등의 공해 방지 및 도시경관 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2026

○ 위 치 : 거제시 양정동 903-21번지 일원

○ 규 모 : 근린공원 조성 A=9,375㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	8,016	516	73	4,427	3,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,016	516	73	4,427	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2024. 07. : 공원조성계획 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 09. : 공원조성계획 변경 결정 및 실시계획인가 고시

□ 향후계획

○ 2025. 04. : 지방재정 투자재심사(48억원⇒80억원)

○ 2026. 1.~12. : 공사착공 및 준공

사업명

독봉산웰빙공원 확장사업

담당자

공원관리사업소 이동훈

(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상동동, 고현동 및 수양동 주민 모두에게 녹지쉼터와 여가생활 공간을 제공함으로써 공공복리 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2028

○ 위 치 : 거제시 상동동 산16-2번지 일원

○ 규 모 : 근린공원 확장 A=96,331㎡(기 조성 A=42,736㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	43,000	-	40	1,860	41,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	43,000	-	40	1,860	41,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2024. 07.: 공원조성계획 및 실시설계용역 착수

○ 2024. 11.: 재해영향성검토 및 소규모환경영향평가 용역 착수

□ 향후계획

○ 2025. 10. : 공원조성계획 변경 결정 및 실시계획인가 고시

○ 2026~2027 : 편입토지 손실보상

○ 2028. 01.~12. : 공사착공 및 준공

사업명

수월근린공원 조성사업

담당자

공원관리사업소 이동훈

(☎639-4384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민들의 건강·휴양 및 정서생활의 기여, 도시의 자연환경을 보전하고

미세먼지등의 공해 방지 및 도시경관 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 거제시 고현동 1082-2번지 일원

○ 규 모 : 근린공원 조성(A=22,482㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	26,200	100	55	10,000	16,045
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	26,200	100	55	10,000	16,045
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2023. 06 : 실시설계용역 착수

○ 2023. 10.: 주민설명회 개최

○ 2024. 10.: 재해영향성검토 협의(원안 통과)

□ 향후계획

○ 2025. 02.: 공원조성계획 변경 결정 및 실시계획인가 고시

○ 2026. 01.: 편입토지 손실보상

○ 2027. 01.~12.: 공사착공 및 준공

사업명

2024 거제 정원산업박람회

담당자

공원관리사업소 김두일

(☎639-4373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원박람회 개최로 시민들에게 다양한 휴식·문화공간을 제공하고 시민이 직접 참여할 수 있는 정원문화 확산에 기여

○ 정원박람회 개최를 통한 거제시 정원 입지의 우수성을 알리고 한·아세안 국가정원 조성사업 예비타당성 조사 통과를 위한 지역공감대 형성 및 대응책 마련

□ 사업개요

○ 목 적 : 정원에 대한 시민들의 관심도 제고를 통한 정원문화 확산의 장 마련

○ 내 용 : 주제와 스토리가 있는 시민 친화적 정원산업박람회 개최

○ 기 간 : 2024. 9. 27. ~ 29.

○ 위 치 : 능포수변공원(능포동 564-25 일원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	280	-	280	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	280	-	280	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2024. 02. : 거제시 자체 지방재정 투자심사 의뢰

○ 2024. 04. : 제1회 추경 예산 편성

○ 2024. 05. : 정원산업박람회 운영대행사 선정 및 운영

○ 2024. 06. : 정원산업박람회 참여업체 공모

○ 2024. 07. ~ 08. : 정원산업박람회 조성 및 공간 연출

○ 2024. 09.(3일간) : 정원산업박람회 개최

○ 2024. 11. : 평가보고(추진성과 및 발전방안)

□ 향후계획

- 2025 거제 정원산업박람회 개최

□ 성과

○ 우리시 자체 주최·주관하는 첫 정원 관련 행사로서 호응과 관심도가 높았음

○ 정원 관련 정보, 지식 공유 등 소통의 장 마련

○ 정원과 더불어 문화·공연 등 볼거리, 즐길거리 확충

○ 시민들의 참여로 정원문화 활성화 및 정원에 대한 관심 제고

○ 언론보도, 블로그 등 온라인 매체를 활용한 행사 후기 및 정보 전파

사업명

2025 거제 정원산업박람회

담당자

공원관리사업소 김두일

(☎639-4373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원박람회 개최로 시민들에게 다양한 휴식·문화공간을 제공하고 시민이 직접 참여할 수 있는 정원문화 확산에 기여

○ 정원박람회 개최를 통한 거제시 정원 입지의 우수성을 알리고 한·아세안 국가 정원 조성사업 예비타당성 조사 통과를 위한 지역공감대 형성 및 대응책 마련

□ 사업개요

○ 목 적 : 정원에 대한 시민들의 관심도 제고를 통한 정원문화 확산의 장 마련

○ 내 용 : 주제와 스토리가 있는 시민 친화적 정원산업박람회 개최

○ 기 간 : 2025. 4. 25. ~ 27.

○ 위 치 : 거제시농업개발원(거제면 서정리 855-19 일원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 281백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	281	-	-	281	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	281	-	-	281	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2024. 10. : 거제시 자체 지방재정 투자심사 의뢰

□ 향후계획

○ 2025. 01. : 정원산업박람회 운영대행사 선정 및 운영

○ 2025. 02. : 정원산업박람회 참여업체 공모

○ 2025. 03. ~ 04. : 정원산업박람회 조성 및 공간 연출

○ 2025. 04.(3일간) : 정원산업박람회 개최

○ 2025. 05. : 정원산업박람회 개최 결과 보고

○ 2026 거제 정원산업박람회 개최

□ 성과

○ 3일간 3만 2천여 명의 관람객 확보로 정원도시 인식 부여 및 지역축제로 자리매김

○ 아세안 10개국 테마별 여행지 사진전 개최(한·아세안 국가정원 이해 관심 제고)

○ 시민 및 기업이 참여한 참여정원, 각종 문화 체험 프로그램 및 행사 부스를 통해 중앙부처, 부서간, 기관간, 업체간 협력 및 소통 효과 극대화

○ 다양한 매체 소개 및 각종 언론 다수 보도(뉴스, 유튜브, 블로그 등)

○ 참관객 85% 이상 재방문 및 주변인 추천 의사 표현