□ 주요 투자사업 추진현황

우리 시에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 1 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2024년 집행사업비	2025년	2026년 이후
상권활성화사업	8,000	-	-	1,378	6,622	2029	2024	0
중소형 조선소 생산기술혁신(DX) 센터 구축사업	26,400	4,900	6,100	5,100	10,300	2027	2023	30
선박용 액체수소 실증설비 구축	19,500	-	1,600	4,600	13,300	2028	2024	10
여차항 어촌뉴딜300사업	10,369	6,221	4,148	-	-	2025	2020	70
성포항 어촌뉴딜300사업	8,760	5,252	3,504	-	-	2025	2021	70
사등권역 어촌뉴딜300사업	9,730	1,430	3,400	4,900	-	2025	2022	50
장목항 어촌신활력 증진사업	31,000	-	2,700	2,900	25,400	2027	2023	20
장승포 Post-어촌뉴딜 시범사업	7,000	1,720	-	5,280	-	2025	2023	60
도장포 해금강 어촌신활력증진사업	10,000	93	763	1,000	8,144	2026	2023	30
다목적 어업지도선 건조 사업	4,799	1,805	2,994	-	-	2024	2022	100
공동생산 시설지원 (친환경 개체굴 생산시설)	2,000	1,658	340	-	-	2024	2022	100
거제시 소규모 바다목장 조성사업	2,000	800	400	400	400	2026	2022	61
다기능 환경정화선 건조사업	2,000	-	-	-	2,000	2027	2023	5
수산업 경영인 경남대회 개최	100	-	100	-	-	2024	2023	100
거제문화예술회관 무대설비 시설개선공사	8,685	4,545	3,933	207	0	2025	2023	70
거제시 문화 예술지원센터 건립	11,752	551	3,504	7,697	0	2025	2023	90
김영삼대통령 기록전시관 주차환경개선사업	2,700	-	-	-	2,700	2027	2024	5
거제 시립박물관 건립	26,000	484	50	50	25,416	2030	-	20
거제 총명사 전통문화체험관 건립	2,500	-	120	1,630	750	2026	2024	30
파노라마형 서핑스테이션 조성사업	11,316	626	774	2,200	7,716	2027	2022	20
오비 노을전망대 조성사업	4,870	-	-	-	4,870	미정	2024	5
장승포 365 전망대 조성사업	5,400	-	-	2,399	3,001	2027	2023	15
노자산 선셋브릿지 조성사업	14,036	-	-	671	13,365	2027	2024	10
흥남철수기념공원 조성사업	15,000	12,800	2,200	-	-	2026	2018	30
도장포 관광버스 주차장 설치사업	16,000	9,248	2,902	3,850	-	2026	2022	73
이순신 승전지 순례길 프로젝트	5,800	-	280	-	5,520	2027	2024	2
거제시 공공파크 골프장 조성	11,800	19	-	2,000	9,781	2026	2024	0
거제 반다비 체육센터 건립	17,400	14,000	3,400	-	-	2024	2022	100
산달도 해안도로 정비사업	3,610	3,308	296 (이월액)	-	-	2024	2017	100
학동흑진주 몽돌해변 주차장 조성사업	6,500	-	5,470	-	-	2024	2023	100
거제시 종합사회복지관 이전신축	12,073	7,126	4,947	-	-	2024	2021	100
거제시청소년복합체험문화시설 건립	33,550	-	29	-	33,521	2031	2024	10
장승포동 다어울림행복문화센터 건립 (생활SOC복합화사업)	8,900	1,206	5,694	2,000	-	2025	2020	90
거제시장애인복지관 리모델링	7,250	330	200	5,500	1,220	2026. 4.	2024	20
거제시립장승포 도서관 재건축	8,500	3,735	4,717	17	-	2025	2020	99
(가칭)거제중앙도서관 건립	47,300	100	2,200	1,309	43,691	2029	2024	20
조선산업 배후도시 활력증진사업 (도시활력증진지역 개발사업)	6,000	4,295	350	-	1,355	2025	2017	77
신거제대교 진입관문 설치사업	3,146	16	130	-	3,000	2027	2023	5
아주천 생태하천 복원사업	10,615	5,000 (1,134)	5,615 (4,558)	- (4,923)	-	2026	2022	70
상문동 주민센터 뒤 공영주차장 조성	8,154	5,407	1,217	1,530	-	2025	2022	80
아주 공영주차장 조성사업	14,000	53	4,240	5,127	4,580	2026	2023	50
중곡 공영주차장 조성사업	5,350	-	5,297	53		2025	2023	100
덕포해수욕장 공영주차장 조성	6,000	-	54	2,246	3,700	2026	2023	50
중곡 주차타워 조성사업	12,600	500	-	400	11,700	2027	2024	15
거제 견내량 독수리 스마트복합쉼터 조성사업	9,000	-	18.7	411.3	8,570	2027	2024	10
관포IC~임호간 도로확·포장(시도12호선)공사	27,000	15,031	400	200	11,369	2026	2014	55
와현~예구간(농어촌도로101,302호선)도로정비공사	4,900	3,592	1,308	-	-	2025	2020	90
지방도1018호선 (용산교차로~삼룡초교앞)도로 확·포장공사	5,700	5,000	200	500	-	2025	2021	90
가조도 회주도로(시도15호선)굴곡도로 개선사업	4,800	-	-	200	4,600	2027	2022	10
시도12호선(장목유호)굴곡도로 개량공사	1,300	1,000	300	-	-	2024	2022	100
연담~학동(2)도로확포장(지방도1018호선)공사	3,930	2,165	500	1,000	265	2026	2021	40
문동~삼거 위험도로 개선	3,800	-	630	2,016	1,154	2027	2024	10
상동도시계획 도로 (중로2-13호선)개설	26,000 (민간자본포함)	6,760	14,927	3,313	1,000	2024	2021	75
사등도시계획 도로 (중로3-3호선)개설	5,291	941	1,500	1,500	1,350	2026	2021	50
상동도시계획 도로 (중로2-23호선)개설	8,950	7,550	700	100	600	2026	2021	10
상문도시계획 도로(대로2-2, 중로 1-31호선) 개설	33,736	6,380	9,500	1,000	16,856	2026	2022	5
수양도시계획 도로 (대로3-9호선)개설	11,740	5,100	40	100	6,500	2025	2022	5
수월도시계획 도로 (소로3-85호선)개설	45,000	2,180	200	0	42,620	2030	2022	5
일운도시계획 도로 (중로3-18호선)개설	4,840	40	1,500	200	3,100	2027	2022	20
연초도시계획 도로(중로3-13호선)개설	6,000	0	66	600	5,334	2025	2023	10
수양도시계획 도로(소로2-149호선)개설	2,900	0	700	800	1,400	2025	2023	50
고현도시계획 도로(소로1-C호선)개설	5,330	0	0	50	5,280	2026	2023	5
상동도시계획 도로(중로2-97호선)개설	4,500	0	0	50	4,450	2027	2023	5
연초도시계획 도로(소로1-66호선)개설	2,540	40	700	200	1,600	2027	2023	15
옥산도시계획 도로(소로2-24호선)개설	2,000	50	-	100	1,850	2027	2023	10
와현도시계획 도로(중로3-A호선, 3-B호선) 개설	4,800	0	150	500	4,150	2027	2023	15
일운도시계획 도로(중로3-11호선)개설	2,500	730	100	100	1,570	2027	2023	5
동부도시계획 도로(대로3-1호선) 개설	7,400	-	-	100	7,300	2028	2024	5
장승포동 두모교차로 회전교차로 설치사업	3,000	-	-	280	2,720	2025	2024	50
관내 배수지 위생관리 개선사업	7,598	7,598	-	-	-	2024	2021	100
거제시 하수준설토 처리시설 설치사업	3,000	3,000	-	-	-	2025	2022	80
중촌마을 어린이공원 조성사업	2,400	-	40	-	2,360	2026	2023	15
연초도시계획도로 (중로2-40호선 외 3개소) 개설	5,105	50	3,125	326	1,604	2026	2023	20
거제 치유의 숲 조성사업	8,300	5,000	3,300	-	-	2024	2021	100
고현동 복합커뮤니티센터 신축	31,200 (토지포함)	6,463	3,304	226	21,207	2028	2023	20
장목면사무소 신축	10,000	200	2,160	320	7,320	2027	2023	60
고현동 주차장 조성	6,500	500	-	-	6,000	2026	2023	5
연초면 공용 주차장 신축	6,200	-	-	1,500	4,700	2026	2024	5
스마트 빌리지 보급 및 확산사업	2,740	1,260	1,480	-	-	2024	2022	100
반려동물놀이터 조성사업	2,834	1,572	1,262	-	-	2024	2021	100
동부면 율포지구 농촌공간정비사업	9,900	0	4,261	1,777	3,861	2027	2023	40
고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립	3,761	546.5	3,214.5	-	-	2024	2020	100
도란도란 컬쳐 앤 푸드센터 (생활SOC복합화사업)	3,800	204	1,922	1,674	-	2025	2021	65
거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득	5,800	3,906	839	-	1,055	2026	2020	65
아주2 근린공원 조성사업	4,200	239	9	1,000	2,952	2026	2021	4
양정근린공원 조성사업	8,016	516	73	4,427	3,000	2026	2021	4
독봉산웰빙공원 확장사업	43,000	0	40	1,860	41,100	2028	2024	4
수월근린공원 조성사업	26,200	100	55	10,000	16,045	2027	2024	5
2024 거제 정원산업박람회	280	-	280	-	-	2024	2024	100
2025 거제 정원산업박람회	281	-	-	281	-	2025	2024	20

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2024년에 추진한 사업

우리 시에서 ‘24년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 2 지방채 발행사업

(단위 : 백만원)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
거제중앙 공공하수처리 시설 증설사업	70,479	14,000	17,061	8,530	9,301	21,587	14,000	100%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2024년에 추진한 사업

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

거제중앙 공공하수처리시설 증설사업

담당자

상하수도과 김숙경

(☎639-4916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거제시 하수도정비 기본계획(변경)에 반영된 3,4단계 하수처리시설 증설       사업(3단계 13,000㎥/일, 4단계 11,000㎥/일) 통합 시행(24,000㎥/일)으로       처리구역 내 적정 하수 처리를 통한 공중위생 향상 및 수질 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 01. ~ 2024. 02.(8년)

○ 위 치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원

○ 규 모 : 공공하수처리시설 증설 Q=24,000㎥/일, 중계펌프장 증설 Q=36,000㎥/일,

압송관로 매설 L=4.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70,479백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	70,479	70,479	-	-	-
지 방 채	14,000	14,000	-	-	-
국 비	17,061	17,061	-	-	-
시 도 비	8,530	8,530	-	-	-
시군구비	9,301	9,301	-	-	-
기 타	21,587	21,587	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 07. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2020. 03. : 재원협의 및 설치인가 완료

○ 2020. 08. : 공사 착공

○ 2023. 09. : 시운전 시작

○ 2024. 02. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

우리 시에서 ‘24년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

□ - 3 민간투자사업

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2024년	2025년	2026년 이후
	해	당	사	항	없	음